투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시인재개발원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	생활관 승강기 설치공사 감리용역 준공기한 연장

1.「인재원 생활관(다솜관) 승강기설치공사 감리용역계약(2014.7.3.)」과 관련입니다.

2. 현재 공사 중인 우리 원 생활관 승강기 설치 및 부대시설공사가 장애인 숙소(208호) 내 샤워실 설치 및 기존 건축물 구조보강 등 공사를 완료하고 승강로 및 승강장 공사 중에 있으나,

3. 당해 공사계약 지연 및 관급의 승강기(장애인용 수직형리프트) 적정 제작 및 설치기간 소요로 인하여 공사감리용역계약기간이 도래함에 따라, 공사감리용역계약 준공기한을 연기하고자 합니다.

가. 계약건명 : 생활관(다솜관) 승강기설치공사 및 부대공사

나. 계약상대자 : 건축사사무소 노아**********

******************************

다. 계약금액 : 금2,090,000원

라. 계약기간 연장내용

1) 사유 : 본 공사계약 지연으로 인한 착공지연 및 장애인 전용 승강기(수

직형 휠체어리프트 - 관급) 적정 제작ㆍ설치기간 소요(60일)

2) 계약기간 연장 : 20일

- 당초 : 2014. 7. 3. ~ 2014. 9. 14.

- 변경 : 2014. 7. 3. ~ 2014. 10. 4.

3) 귀책사유 : 서울특별시 인재개발원

4) 지체상금 부과여부 등 : 부과하지 않음, 계약금액 증감 없음

마. 합의서 등

1) 공사진행 상황 및 감리용역기간 연장에 관한 공사감리자 의견서 제출

2) 계약상대자의『 감리용역기간 연장 합의서』제출

따로붙임 1. 공사감리자 의견서 1부.

2. 용역계약 변경 내역서 1부.

2. 감리용역기간 연장 합의서 1부.  끝.

주무관	김홍태		시설재무팀장	김종엽		인재기획과장	09/15 박기용
협조자
시행	인재기획과-11946	(		)	접수		(		)
우	137-071	서울 서초구 서초1동 남부순환로 340길 58(서초동 391) 서울시 인재개발원	/	http://hrd.seoul.go.kr
전화	02-3488-2051	/전송	02-3488-2346	/		/	부분공개