함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
		중부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	급수공사 연장 지시(용산구 신창동 *****, 개량-17)

용산구 신창동 *****번지 급수공사와 관련해서 다음과 같이 공사를 연장지시하고자 합니다.

1. 신  청  자 : ***

2. 주      소 : 용산구 신창동 *****

3. 연  락  처 : *************

4. 지시  번호 : 개량-17

5. 당      초 : 2014.08.14 ~ 2014.09.16

6. 연      장 : 2014.08.14 ~ 2014.10.17

7. 사      유 : 분기관이 GIG상과 상이하여 추가 굴착으로 인한 도로   굴착허가 등 공기연장 필요【도우 100-71(2014.09.15.) 현장실정보고서)】

8. 공사  개요 : 계량기 30mm 1개, 보호통 30mm 1조 등

9. 시공업체명 : *******

첨부 : 작업지시서 1부.   끝.

주무관							오경록			급수설비팀장					이병운					급수운영과장					09/15 김영삼
협조자
시행			급수운영과-18634									(						)		접수											(						)
우	100-856					서울 중구 장충동2가 208-1															/
전화								/전송			3146-2189					/													/	부분공개(6)