문서번호	시설보수과-6997
결재일자	2014.9.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설보수과장		서부도로사업소장
이동섭	김지환	신동헌		09/15 김만수
협 조

염천교 정밀안전진단 자문회의 개최 계획

2014. 9

서부도로사업소

(시설보수과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(	시설안전자문단	)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	시설물 안전관리에관한 특별법	)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

염천교 정밀안전진단 자문회의 개최 계획

우리 사업소에서 시행하고 있는 「염천교 정밀안전진단 및 수색교외 7개소 정밀점검용역」과 관련, 염천교 강구조구간 재설치 및 보수·보강공사가 완료됨에 따라 자문회의와 건설기술심의 절차를 신속하게 추진하여 상태등급 재평가 및 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ

용역개요

❍ 용 역 명 : 염천교 정밀안전진단 및 수색교외 7개소 정밀점검용역

❍ 용역기간 : 2014. 5. 15 ~ 2015. 1. 9

❍ 계약금액 : 182,328천원

❍ 용 역 사 : ㈜한국시설안전연구원

❍ 용역대상 : 정밀안전진단 : 염천교

정밀점검     : 수색교, 서대문고가, 성산교, 홍남교,

충정교, 신응교, 남산육교, 남산1호입구IC

Ⅱ

추진현황 (공정율 60%)

❍ 2014. 05. 15 : 용역 착수

❍ 2014. 06. 13 : 용역 착수보고

❍ 2014. 08. 12 : 과업대상 시설물 현장 합동점검

❍ 2014. 08. 23 : 염천교 재하시험 실시

〈외관 정밀조사〉	〈합동점검〉	〈재하시험〉

Ⅲ

자문회의 개최 계획

❍ 대상시설 : 염천교(정밀안전진단)

- 염천교는 안전등급 C등급으로 강구조구간 교체 및 보수·보강공사가 완료됨에 따라 신속하게 시설물 상태를 확인하여 안전등급을 재평가하고자 자문회의 및 서울시 건설기술심의 절차를 우선 추진

❍ 자문일시 : 2014. 09. 18(목) 14:00 ~ 16:00

❍ 장    소 : 서부도로사업소 2층 소회의실

❍ 참 석 자 : 총11명

- 사 업 소(5) : 소장, 시설보수과장, 염천교 공사 및 시설담당, 용역담당

- 용 역 사(3) : 책임기술자 외 2

- 자문위원(3) : 서울시 시설안전자문단 자문위원

연번	성 명	소 속 / 직 위	비 고
1	이채규	㈜한국구조물안전연구원 대표	시설안전자문단
2	남상진	㈜동해종합기술공사 부사장	시설안전자문단
3	박광순	한국시설안전공단 수석연구원	시설안전자문단

❍ 보고방법 : 용역 책임기술자가 PPT 발표

❍ 주요 보고내용

- 염천교 현황 및 용역 과업 추진사항 보고

- 기 점검 결과 비교·분석 및 보수공사 추진 현황 검토

- 시설물 외관조사, 내구성조사, 재하시험 결과 및 상태평가 보고 등

❍ 자문사항

- 용역보고서 초안 검토(보고서는 사전 자문위원에 전달)

- 용역 결과에 대한 추가 보완이 필요한 사항 등에 대한 자문

Ⅳ

행정사항

❍ 용역보고서 초안은 사전(약7일전) 자문위원에게 배포

❍ 자문결과 반영하여 보고서 보완 후 서울시 건설기술심의 요청

❍ 자문수당 지급 : 총45만원

- 산출내역 : 15만원(기본 10만원+2시간이상 5만원) × 3명

- 지출방법 : 용역비에 계상되어 있는 자문비로 선지급 후 정산

Ⅴ

향후계획

❍ 2014. 9. 25  : 서울시 건설기술심의 소위원회 심의의뢰

❍ 2014. 10월초 : 서울시 건설기술심의 상정

❍ 2014. 10월중 : 염천교 정밀안전진단 결과보고 및 안전등급 확정

❍ 2014. 10월중 : NDMS 및 도로관리시스템 입력 관리.  끝.