함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	설계변경(준공정산) 및 계약의뢰 (을지로별관 가설건축물 철거공사)

『을지로별관 가설건축물 철거공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경(준공정산)을 시행하고자 하오니, 계약에 반영하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 을지로별관 가설건축물 철거공사

나. 계약업체 : 해담건설 대표 김대원

다. 계약기간 : 2014.8.12. ~ 2014.9.12.(변경없음)

라. 변경사유 : 제경비 정산

마. 예산과목 : 청사관리, 시청사 및 영조물관리, 시설비

바. 변경내역

구 분	금 액(원)			비고
	최초계약	금회 설계변경	증 감 액
총 공 사 비	69,533,540	66,349,820	감3,183,720

붙임  1. 설계변경 보고서  1부

2. 합의서 및 변경설계서  1부. 끝.

	총무과장
주무관	이승준		시설관리팀장	최석기		총무과장	09/16 이혜경
협조자
시행	총무과-24767	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울특별시 중구 세종대로 110, 서울시청 7층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	2133-5647	/전송	2133-0772	/	pado0304@seoul.go.kr	/	부분공개(7)