투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신	시설과장
(경유)
제목	[변경계약 체결통보]-표범여우늑대사 전시장 공사 기본 및 실시설계 용역

1. 조경과-5493(2014. 9.15)호와 관련입니다.

2. 귀 부서에서 의뢰한 사업(용역) 계약건에 대하여 아래와 같이 (변경)계약 체결하였음을 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

◎ 계약체결 현황(1차 변경)

(단위 : 원)

사 업 명	계약자(대표)	계약금액	계약일 (변경계약일)	계약기간
				변경 전	변경 후
표범여우늑대사 전시장 공사 기본 및 실시설계 용역	㈜거성엔지니어링 (대표:이용우)	85,892,400	2014.4.17 (2014.9.15)	2014.4.17.~ 2014.9.13	2014.4.17.~ 2014.10.31

※ 계약금액 변동없음

따로붙임  변경계약서(승인통보) 1부.  끝.

	총무과장
주무관	김희준		주무관	최호철		총무과장	09/16 이경로
협조자
시행	총무과-13150	(		)	접수		(		)
우	427-702	경기 과천시 막계동 서울대공원 대공원광장로102	/	http://grandpark.seoul.go.kr/
전화	02-500-7231	/전송	02-500-7991	/		/	부분공개