문서번호	도로계획과-11846
결재일자	2014.9.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	광역도로계획팀장	도로계획과장	시설안전정책관
윤갑진	방영복	형태경	09/16 한제현

준공기한 연기 보고

(제물포길 지상부 친환경공간 조성 타당성조사 및 기본계획 용역)

2014. 9.

도시안전실

도로계획과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

준공기한 연기 보고서

1. 용역개요

가. 용 역 명 : 제물포길 지상부 친환경공간 조성 타당성조사 및 기본계획

나. 계 약 자 : ㈜수성엔지니어링, ㈜천일

다. 계약금액 : 금삼억일천구백사십만원정(￦319,400,000)

라. 계약년월일 : 2013년 5월 15일

마. 착수년월일 : 2013년 5월 16일

바. 준공예정일 : 2014년 9월 30일

2. 보고내용

○ 위 용역의 준공기한을 다음과 같이 연기하고자 합니다.

가. 준공기한

- 당  초 : 2014년 9월 30일

- 변  경 : 2014년 12월 31일

나. 연기 귀책사유 : 서울특별시

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유

- 타당성조사 결과에 대한 서울공공투자관리센터 검증(‘14.9~12월) 및 검토결과 반영 필요

※ 근거 : 서울공공투자관리센터 설립·운영계획(시장방침 제88호, ‘12.3.27),
서울공공투자관리센터 타당성조사과제 선정계획(재정담당관-8189, ’12.8.3)

- 제물포터널과 지하차도 중복구간(신월IC~화곡고가)에 대한 우선
시행방안 검토 필요(지하차도 종단선형, 사업비 절감 등 검토)

※ 근거 : 민선6기 업무보고(‘14.6.12) 및 서울시정 4개년 계획 발표(’14.9.4)

2014.  9.

보고자 : 지방시설주사보 윤 갑 진 (인)