함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신자	시설관리과장
(경유)
제 목	공사 변경계약 체결 통보[신내동 조압수조외벽 보수 보강(도장)공사]

1. 시설관리과-21877호(2014. 9.12, 주무관 : 김헌중)와 관련입니다.

2. 『신내동 조압수조외벽 보수 보강(도장)공사』건에 대하여 계약상대자와 아래와 같이 변경계약을 체결하고 통보하오니 업무에 만전을 기하시기 바랍니다.

가. 계약상대자 : 홍인내화(주)  대표 최기식

나. 계약기간

- 당 초 : 2014.04.17. ~ 2014.09.17

- 변 경 : 2014.04.17. ~ 2014.11.20

다. 계약금액

- 당 초 : 금85,775,671원

- 변 경 : 변경없음

라. 변경사유 : 디자인 심의 지연에 따른 착공 지연

붙임  공사변경계약체결통보서 및 관련서류 각 1부.  끝.

	행정지원과장
주무관	윤수광		행정관리팀장	서경란		행정지원과장	09/16 代서경란
협조자
시행	행정지원과-20364	(		)	접수		(		)
우	133-865	서울 성동구 행당1동 131~152 동부수도사업소 1층 행정지원과	/
전화	02)3146-2613	/전송	02)3146-2678	/	dasiboa@seoul.go.kr	/	대시민공개