문서번호	총무과-13992
결재일자	2014.9.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	총무부장
강상천		최대봉	09/16 서영관
협조	기획예산과장		박병현
	주무관		장보금

잠원 안내센터 주방 방수 긴급 보수 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
				9백만원

2014. 9

한강사업본부

총 무 과

잠원 안내센터 주방 방수 긴급 보수 계획

안내센터 직원식당 주방 바닥에 누수 현상이 발생하여 이에 대한 긴급 보수를 시행하고자 함

■ 사업기간 : ‘14. 9. 11 ~ ‘14. 10. 5

■ 사업내용

❍ 주방 방수 긴급 보수

❍ 보수내용

- 주방바닥 : 기존 방수층 철거 후 방수 보수

- 주방기구 이전(철거) 및 재설치

■ 소요예산 : 8,690천원 (부가가치세 포함)

❍ 예산과목 : 세부사업 (한강사업본부 청사시설개선 및 유지관리, 시설비)

■ 추진방법 : 수의계약

■ 추진계획

❍ 2014.  9. 11 ~  9. 12 : 현장조사

❍ 2014.  9. 15 ~  9. 19 : 보수 계획 검토 및 방침

❍ 2014. 10.  1 ~ 10.  2 : 설치계획 발주

❍ 2014. 10.  3 ~ 10. 15 : 계약(착공) 및 공사 추진

❍ 2014. 10. 15 : 준공(예정)

별첨 : 1. 소요예산 산출서 1부.

2. 충전소 및 설치 부지 현황 1부.

# 별첨 1

소요예산 산출서

○ 총공사비 : 8,690천원 (부가가치세 포함)

1	보 수 대 상		잠원 안내센터 주방 방수 긴급 보수
2	보 수 내 용		주방바닥 및 벽체(하부) 방수 철거 및 보수
3	산 출 금 액								단위:천원
연번	구 분		규 격	수량	단위	단 가		금 액	비 고
1)	재료비 (직접재료비)			식	1	1,389		1,389
2)	노무비	2)-1 소계		식	1	4,797		4,797
		2)-2 직접노무비		식	1	4,397		4,397
		2)-3 간접노무비		식	1	400		400
3)	경비	3)-1 소계		식	1	318		318
		3)-2 보험료 등		식	1	0		0
		3)-3 기타경비		식	1	318		318
4)	간접비	4)-1 소계		식	1	1,396		1,396
		4)-2 폐자재처리비		식	1	250		250
		4)-3 일반관리비	6%	식	1	390		390
		4)-4 이윤	15% 미만	식	1	756		756
5)	소 계							7,900
6)	부가가치세		10%					790
7)	합 계							8,690

# 별첨  2.

주방 누수 현황

트랜치 주변 누수 현황

바닥/벽 방수층 분리 현황