문서번호	방재시설부-8983
결재일자	2014.9.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경시설과장	방재시설부장
임경태		代송민영	09/16 임춘근
협조
	주무관		이호기

부력방지앵커 Block out 개구부 보강에 대한 검토보고

서남분뇨처리시설 증설 및 현재화사업

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 9.

도시기반시설본부

방재시설부

서남분뇨처리시설 증설 및 현대화 사업

부력방지앵커 Block out 개구부 보강에 대한 검토보고

「서남분뇨처리시설 증설 및 현대화 사업」 관련 감리단이 제출한 부력방지앵커 Block out 개구부 보강 승인요청에 대한 검토 보고임.

(관련근거 서분감 2014-489호)

공사개요

❍ 공 사 명 : 서남분뇨처리시설 증설 및 현대화 사업

❍ 규    모 : 분뇨처리시설 4,000톤/일, 상부공원화 등

❍ 사업기간 : 2011. 11. 15 ∼ 2015. 02. 02

❍ 총사업비 : 73,200백만원(도급비 63,470백만원)

❍ 감리/시공사 : (주)도화엔지니어링 외1/ 대림산업(주)외2

보고내용

❍ 실정보고 사유

- 분뇨처리시설 지하3층 슬래브 시공에 있어 부력방지앵커 설치로 인한 Block out 구간에 바닥슬래브 상부철근을  절곡하여 배치하는 것으로 계획되어있으나 절곡철근 배치시 철근에 인장력이 작용하여 콘크리트를 박락시키는 2차응력이 발생될 우려가 있기에 개구부 보강철근으로 배치 필요.

❍ 부력앙카 설치를 위한 바닥슬래브 철근 단면도

Block out 단면도	당 초(시공사)	변 경(감리단)

❍ Block out 구간 보강철근 배치 계획

구 분	SEC-1(50개소)		SEC-2(70개소)
	종방향	횡방향	종방향	횡방향
철근직경	H29	H29	H32	H32
정착길이	1,254mm	1,254mm	1,394mm	1,394mm
배근개수	10본	10본	10본	10본

❍ 수량 및 공사비 검토

공사내용			단위	수량			금액(백만원)			비고
				당초	변경	증,감	당초	변경	증,감
토목	구조물공	철근가공조립 외	ton	-	51.820	51.82	-	17	17
	주요자재	고장력철근	ton	-	53.374	53.374	-	43	43
순공사비			식	1	1	-	0	60	60
제경비			식	1	1	-	-	24	24
합 계			식	1	1	-	-	84	84

기술지원감리 검토의견

❍ 철근을 절곡하여 시공하면 절곡 부위에서 주 인장철근이 본래의 역할을 하기 어려우며, 또한 철근에 인장력이 작용하여 콘크리트를 박락시키려는 2차응력이 발생될 우려가 크므로 철근을 절곡하기 보다는 끊어진 철근량 만큼 개구부 보강철근을 배치하는 것으로 재검토를 요청하였으며, 재검토 내용 확인결과 적정함.

책임감리 검토의견

❍ 실시설계도면(도면번호 C-375, 부력방지앵커 시공순서도(예시도))에 Block out 구간에 철근을 절곡하여 배치하는 것으로 계획되어있으나, 기술지원감리원 검토의견과 같이 개구부 보강철근으로 시공하여 구조물 안전성을 확보하고,

❍ 이로 인하여 증액되는 공사비는 공사계약일반조건 제21조(설계변경으로 인한 계약금액조정의 제한 등)에 의거 전체 계약금액 증액없이 계약금액 내에서 추후 설계변경 시 반영.

조치의견

❍ 부력방지앵커 Block out 개구부 보강건에 대하여 검토한바, 책임감리 검토의견이 타당하다고 판단되어 실정보고 내용을 승인토록하고.

❍ 전체 계약금액 증액없이 계약금액 내에서 추후 설계변경 시 반영코자 함.

붙임 : 기술지원감리원 및 책임감리원 검토의견서 등 1식.  끝.