문서번호	교육협력과-4449
결재일자	2020.8.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
교육팀장	교육협력과장		경영관리부장		상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
하개헌	홍영전		김영기		구아미		08/24 백호
협 조
	생산부장					서대훈
	급수부장					代송헌영
	시설관리부장					강호광

상수도 현장업무 전문화를 위한

현장실습장 건설 변경계획

2020. 8

상수도사업본부

(교육협력과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

목   차

Ⅰ.	사업 개요	1
Ⅱ.	그간 추진사항	1
Ⅲ.	변경 추진계획	2
Ⅳ.	행정 사항	5

상수도 현장업무 전문화를 위한

현장실습장 건설 변경계획

상수도 현장 대응 능력을 갖춘 상수도 전문 인력 양성을 위하여 4차 산업기술(AI, IoT, ICT 등) 등이 반영될 수 있도록 상수도 현장실습장 건설계획을 변경하고자 함

Ⅰ		사업개요

사 업 명 : 상수도 현장실습장 건설

사업기간 : 2020~2021년

장    소 : 강북정수장 내

*****************

사업내용 : 4차 산업기술을 적용한 상수도 현장실습장 건설

❍ 실외 실습장(배관망 조성) : 8,000㎡

- 배관망(D=100~500㎜, L=1,800M), 배수지, 가압장, 계측기, 밸브 등

❍ 실내 실습장 : 500㎡

- 배관 접합․결합, 전기설비교육, VR실습장, 중앙제어실 등

Ⅱ		그간 추진사항

○ 2019.10.23. 상수도 현장업무 전문화를 위한 교육시설 확충계획 수립

○ 2019.11.27.~2020.08.11. 현장실습장 건설 TF팀 회의(1~5차)

○ 2020.04.23.~5.12 기술용역 타당성심사 등 발주 사전 심의

○ 2020.05.20. 상수도 현장실습장 건설 자문위원회 구성 및 1차 회의

****************************************************

Ⅲ		변경 추진계획

변경개요

***********************************************************************

○ 변경내용

구 분	당 초	변 경
******	********	*****************
사업기간	2020년~2021년	2020년~2021년
****	*********** *************	********** *************
추진방법	일괄 추진	단계별 추진 (1단계 실외→ 2단계 실내 등)

추진방향 : ‘실외실습장’(엔지니어링)과 ‘실내 실습장’(건축․정보통신 등)의 2개 분야로 나누어 단계별 추진

실외 실습장 건설(1단계)

○ 목적 : 현장과 같은 크기, 형태의 시설물을 설치하여 수계조절 등 실습 통해 업무 노하우 습득 및 현장 대응력 강화

*******************************

○ 주요 시설 : 배관망, 배수지, 수질자동측정기, 관로탐지시설, 자동드레인 등

※ 설계분야 : 엔지니어링(실외 실습장)

○ 실습내용 : 수계조절 시뮬레이션, 배수관 소블록 물세척, 내시경 조사, 누수탐지‧복구, 관망 해석 등

수계조절 실습	누수탐지 실습	무단수 누수 복구 실습

○ 추진절차 : ’20년 설계 → ’21년 공사 → ’22년 운영

******************

세부내역			금액(천원)
************************			*********
	***************		*********
		****************************************	*********
		*************	*******
		**************************	*******
		**************	*******
		*************	*******
		***************************	*******
	****		*******

중앙제어

정수장

배수지

실내 실습장 건설(2단계)

○ 목적 : 4차산업기술을 적용한 실습장(중앙제어실, VR 교육장 등) 및 전시장 설치로 전문 상수도인 육성과 기술 계승

*****************************

○ 주요 시설 : 중앙제어실, 가상교육장(VR), 전시장 등

※ 설계 분야 : 건축(실내 실습장), 정보통신(중앙제어실), 학술연구(4차산업기술 적용 교육콘텐츠)

○ 실습내용 : 전기실습, 가상교육(VR), 전시장(신기술 제품, 다양한 밸브 실물, 2,200㎜ 대형 배관(일부 절단) 등)

중앙제어 및 전기 실습	가상현실(VR) 실습	전시(수도관 조사 로봇)

○ 추진절차 : ’21년 설계 및 공사 → ’22년 운영

※ 세부내역(안)

세부내역			금액(천원)
******************			*********
	******************		*********
		**************	*********
		********************	*******
		***********************	*******
	****		*******

Ⅳ		행정 사항

연도별 소요예산

****	*****	*****
***** *****	*** ********	***** ********************

향후일정

○ 1단계(실외 실습장)

- 설계용역 발주 : 2020. 9월

※ 발주전 사전심의(기술담당관)

기술용역 타당성 심사 → 용역발주 심의 → 사업수행능력 세부평가 기준 심의

※ 용역계약 추진절차

사전규격 공개 및 입찰공고		참 여 자 접 수		PQ심사		적격자 통보 및 이의신청		가격투찰		적격심사		계 약
8일		1일		14일		14일		3일		14일		1일
(교육협력과/ 본청 재무과)		(교육협력과)		(교육협력과)		(교육협력과)		(심사 통과자)		(본청 재무과)		(교육협력과)

- 설계용역 시행 : 2020. 11월~2021. 2월

- 공사 발주     : 2021. 3월

- 공사 시행     : 2021. 5월~2021. 12월

○ 2단계(실내 실습장)

- 설계용역 발주 : 2021. 1월

- 설계용역 시행 : 2021. 3월~6월

- 공사 발주     : 2021. 7월

- 공사 시행     : 2021. 9월~2022. 2월.  끝.