문서번호	교육협력과-4560
결재일자	2020.8.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
교육팀장		교육협력과장	경영관리부장
하개헌		홍영전	08/26 김영기
협조
	계획설계과장		송헌영

상수도 현장업무 전문화를 위한

현장실습장(실외실습장) 건설 설계용역 변경계획

2020. 8.

상수도사업본부

(교육협력과)

상수도 현장업무 전문화를 위한

현장실습장(실외실습장) 건설 설계용역 변경계획

현장실습장(실외실습장) 건설의 설계용역에 대하여 *********************************설계용역 기간단축 및 예산절감 하고자 함

Ⅰ		사 업 개 요

사 업 명 : 상수도 현장실습장 건설

사업기간 : 2020~2021년

장    소 : 강북정수장 내

사업예산 : ********

사업내용 : 4차 산업기술을 적용한 상수도 현장실습장 건설

❍ 실외 실습장(배․급수망 구성) : 8,000㎡

- 배관망(D=100~500㎜, L=1,800M), 배수지, 가압장, 계측기, 밸브 등

❍ 실내 실습장 : 500㎡

- 배관 접합․결합, 전기설비교육, VR실습장, 중앙제실 등

Ⅱ		현황 및 문제점

현  황 : 「현장실습장 건설 변경계획」수립(’20.8.24.)

○ 실외 실습장(엔지니어링)과 실내 실습장(건축·정보통신 등) 2개분야 단계별 추진

- 실외 실습장(1단계)****************************

- 실내 실습장(2단계) ************************

○ 소요예산 : **************************************

문제점

○ ’20. 10월 실외 실습장 설계용역 계약시, ’21. 2월 설계용역 완료 예상

(’20. 11월 ~ ’21. 2월 : 4계월) → 신속한 사업 수행 방법 모색 필요

Ⅲ		변경방안 및 기대효과

변경방안

○***************************

기대효과

○ 별도 계약 체결기간이 불필요하므로 실외 실습장 설계용역 기간 단축

○ 절감 예산 활용하여 2단계 일부 사업 설계용역 조기 발주

- 실외실습장 설계비***********************************

Ⅳ		향 후 일 정

실외실습장

설 계		공사발주 및 계약		공 사		실습장 운영
’20.9~12월		’21.1~ 3월		’21.4 ~ 12월		’22년

실내실습장(조기발주 할 경우)

설계용역 발주 및 계약		설 계		공사발주 및 계약		공 사		실 습 장 운 영
’20.9~10월		’20.11~’21.4월		’21.5~ 6월		’21.7월 ~’22. 2월		’22년

※ 건축분야의 일정임

붙임 : 상수도 현장업무 전문화를 위한 현장실습장 건설 변경계획 1부.  끝.