문서번호	방재시설부-9007
결재일자	2014.9.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
박계현		정일환	09/17 임춘근
협조
	주무관		강종희

「경의선숲길 공원조성공사」

관급자재(철도레일) 반입관련 실정보고 검토 보고

2014. 9

도시기반시설본부

방재시설부

『경의선숲길 공원조성공사』

관급자재(철도레일)반입관련 실정보고 검토 보고

「경의선숲길 공원조성공사」 시행에 필요한 관급자재(철도레일) 매입 계약체결과 관련하여 철도레일 현장 반입에 대한 검토 보고임.

▶ 관련공문 : 경의경춘(감)제2014-528호(2014.9.2.)

Ⅰ

공사개요

○ 공 사 명 : 경의선숲길 공원조성공사(2단계)

○ 위    치 : 용산문화체육센터 ~ 가좌역

○ 규    모 : 공원조성 84,268㎡, L=3.48km

○ 사업기간 : 2013.9 ~ 2016.3

○ 공 사 비 : 11,812백만원

Ⅱ

실정보고 사유

○ 한국철도시설공단에서 매입 계약 체결된 철도레일(관급자재)에 대한 현장      반입과 관련, 반입에 따른 레일절단, 상·하차비, 운반에 대한 비용을 설계     반영코자 함.

○ 반입비용 산출내용

- 반입수량 : 124.8 ton(L=2,408m)

- 운반거리 : 55㎞(경기도 동두천 ~ 서울 마포구 연남동 공사현장)

- 중량으로 매입 계약 체결된 레일분류 및 식별, 계량 등 수량확인 비용

- 철도레일 운반 및 현장반입을 위한 절단 비용

- 철도레일 상·하차 및 운반 비용

○ 소요비용 검토

- 단가산정

· 해당 전문업체 비교 견적가(3개 후보업체 중 최저가)

- 소요공사비

구 분	금 액	비 고
순공사비	11,521,872
1) 재료비	640,104	단가 × 낙찰율 80.013% 적용
2) 노무비	3,360,546
3) 경 비	7,521,222
2. 제경비	4,648,128	부가가치세 포함
3. 도급액	16,170,000

Ⅲ

감리단 검토의견

○ 『경의선숲길 공원조성공사』 철도레일(관급자재) 반입 비용 실정보고에 대하여 검토한 결과 철도레일(관급자재) 반입에 소요되는 비용을 설계반영하는 것은 타당하며, 해당 전문업체 비교 견적으로 산정한 소요 공사비는 전문성과 원활한 자재 운반 및 반입을 고려하여 적정한 것으로 판단됨.

Ⅳ

검토결과

○ 『경의선숲길 공원조성공사』 철도레일(관급자재)반입에 대한 감리단의 의견이 타당하다고  판단되며 설계변경시 반영토록 승인코자 함.

붙  임 : 감리단 실정보고서 1부.  끝.