문서번호	교량보수과-5870
결재일자	2014.9.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	교량보수과장
정병구	백운경	09/17 이수근

『서강대교 보수공사』

변경 직접시공계획 및 하도급 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 9.

서부도로사업소

(교량보수과)

『서강대교 보수공사』

변경 직접시공계획 및 하도급 검토보고

우리 사업소에서 시행하고 시설관리공단에서 감독중인 『서강대교 보수공사』와 관련하여  시설관리공단에서 제출한 변경 직접시공계획 및 하도급 관련 서류에 대해 관련규정에 의거 타당성 검토 후 결과를 보고함.

근거 : 공사감독2처-15166호(2014.9.12.)

공 사 현 황

공 사 명 : 서강대교 보수공사

공사기간 : 2014. 04. 24 ~ 2014. 11. 19

계약금액 : 802,236,000원

계 약 자 : 명우엔지니어링(주) 대표 이진우

주요공사 내용

- 강재도장(외부 3,175㎡, 내부 349㎡), 균열보수 58m

- 이동식 Rock작업차 1식, 측구수로정비 1,419m

하도급계약 현황

공 종	원도급액(원)	하도급 계약 현황			하도급율
		당 초	변 경	회사명
강재도장공	138,578,000	121,990,000	124,900,600	양지엔지니어링(주)	90%
하도급 외 (직접시공)	663,658,000				직접시공비율 82.72%
합 계	802,236,000

검토결과

설계변경에 따른 도급비가 변경되어 도급사의 직접시공계획(변경2회) 및 하도급(변경1회) 변경사항으로, 건설산업기본법 등 관련규정에 적정함.

조치의견

『서강대교 보수공사』의 직접시공계획 및 하도급 변경계약 요청사항을 검토한 결과 관련법규에 부합(적정)되므로 감독위탁기관인 서울시시설관리공단에 계약승인 통보 조치코자 함.

따로붙임 : 1) 시설관리공단 하도급계약 사전승인 검토보고서 1부.

2) 직접시공계획 및 하도급 변경 계약내역서 각 1부.   끝.