문서번호	도시철도설비부-8466
결재일자	2014.9.17.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		신호과장	도시철도설비부장
민종태		김영하	09/17 정찬웅
협 조	송변전과장			김형기
	시설전기과장			서태창
	차량과장			황영일
	설비계획과장			강재천
	정보통신과장			이용기

9호선 2단계구간 인수인계를 위한

E&M 및 시스템분야 업무협의 결과 보고

2014. 9

도시철도설비부

(신    호    과)

9호선 2단계구간 인수인계를 위한

E&M 및 시스템분야 업무협의 결과 보고

‘14.9.5 9호선2,3단계 관리운영자로 결정된 서울메트로와 본부 간 E&M 및 시스템분야 시설물 합동점검 · 인수인계 관련 업무협의 결과를 보고 드림

Ⅰ		회의 개요

○ 일시 : 2014.9.16.(화) 10:30~12:00

○ 장소 : 서울시청 남산별관 지하1층 회의실

○ 내용 : 9호선 2단계 시설물 점검 및 인수인계 절차 협의 등

○ 참석 : 본부(신호과장 등 16명), 서울메트로(강선규 등 9명)

Ⅱ		협의 내용

○ 서울시 도시철도국과 서울메트로 철도사업처 직원 상견례

- 서울메트로 9호선 2단계 운영사업소 조직 구성(별첨1 참조)

- 9호선 2단계 운영사업소 직원은 140명으로 구성 예정

* 현 21명(지원팀 제외) 구성, ‘14.10. → 40명 충원, ’14.12. → 79명 충원

- 운영사업소 사무실은 잠실종합운동장에 물색 중(‘14.10.1 이후 입주)

- 인수인계 등을 감안 실무 중심으로 운영사업소 직원 충원 필요

○ 분야별 추진현황 설명

(송 변 전)

- 송변전, 전차선은 공사완료 상태로 특이사항 없이 시운전 중임

- 시설물 점검 및 인수 등에 관한 계획은 본부와 사전 협의 후 결정

- 영업시운전 개시 이전 변전실 안전관리자 상주 준비 철저

(시설전기)

- 정거장 5개소 전기실과 MCC반 설치 완료

- 조명부하 등 전기설비 완료시 사용전 검사(소방 포함) 완료 예정

- 인계인수를 위한 합동점검 시 도면을 기준으로 하는 것이 타당함

*공구별 턴키공사로 소소한 차이가 있을 수 있음

(차   량)

- 운영사는 영업시운전 이전이라도 시운전에 적극 참여하여 원할한 인계인수 사전 준비에 만전

(설   비)

- 정거장 기계설비는 설치 완료된 상태이며 외부출입구 등 승강 설비는 선행공정 상 설치 및 시험 미진행

- 승강장 안전문(PSD)는 차량, 신호 분야 간 인터페이스 시험 등을 완료(2회)

(통   신)

- 통신, AFC분야는 9호선 1단계의 협력이 절대적으로 필요하므로 서울메트로가 적극 협력 지원

- AFC, 통신관제설비 구축 조속 추진 필요

* 3자(본부, 서울메트로, 1단계 운영사) 합동 회의 →‘14.9.22.(월) 예정

- AFC 소프트웨어 구축 관련 업무는 도시교통본부와 한국스마트카드(KSCC)와 협의 결정 추진

(신   호)

- 신호시스템 안전성을 확인하는 ATC 기능시험을 완료함

- 신호설비 안전확보를 위해 국토교통부가 인정한 (사)한국철도신호기술협회에서 사용전 검사를 받은 상태임

○ 개통 일정 등을 감안 인수인계 준비 철저

- 시설물 합동점검 및 인수인계 일정 · 절차 협의

- 인수인계 대비 시설물 운용교육 준비

- 영업시운전 및 시스템 절체 계획 등

Ⅲ		향후 계획

○ ‘14.10.7 합동점검 추진계획 협의

- 서울메트로 9호선 2,3단계 운영사업소 회의실(잠실종합운동장)

붙임 : 1. 메트로 운영사업소 조직도 1부.

2. 참석자 명단 1부.   끝.