투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경(정산) 시행(2014년 굴착복구시행도로정비공사)

우리사업소에서 시행중인 『2014년 굴착복구시행도로정비공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경(정산)을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2014년 굴착복구시행도로정비공사

나. 공사기간 : 2014. 6. 3 ~ 2014. 9. 20

다. 계약금액 : 256,069,000원

라. 도 급 자 : 대익산업개발(주)  장은남

마. 설계변경(정산)사유

- 공종별 시공물량 증·감에 따른 정산

바. 설계변경(정산)내역

- 물량 변경

공 종	규 격	단위	변경수량		증,감	비고
			당초	변경
절삭후덧씌우기	20a/일	a	222.5	115.83	감)106.67
	50a/일	a	259.2	366.13	증)106.93

- 공사비 변경

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증, 감	비 고
총공사비	901,270,210	790,520,370	감)110,749,840
도 급 비	292,193,210	256,069,000	감)36,124,210
관 급 비	604,521,880	534,451,370	감)70,070,510
이 설 비	4,555,120	0	감)4,555,120

사. 예산과목

- 도로시설물관리, 도로굴착복구(도로굴착복구기금), 도로굴착복구공사,

시설비 및 부대비, 시설비

붙임 : 1, 설계변경(정산) 내역서 1부.

2. 제비율 검증결과 자료 1부. 끝.

주무관	홍수종		도로보수과장	국중진		성동도로사업소장	09/17 정진오
협조자	계약1팀장	김점선
시행	도로보수과-4192	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울 성동구 자동차시장길 41(용답동)	/
전화	2210-1532	/전송	2210-1549	/	hongsc57@seoul.go.kr	/	대시민공개