문서번호	토목부-17952
결재일자	2014.9.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
손준호		권혁대	09/17 노우성
협조
	주무관		이석우

시설공사 준공기한 연기 검토보고

(신촌로 중앙차로 및 교통구조개선공사외 1개소)

2014. 9

도시기반시설본부

(토 목 부)

시설공사 준공기한 연기 검토보고

(신촌로 중앙차로 및 교통구조개선공사외 1개소)

『신촌로중앙차로 및 교통구조개선공사외 1개소』에 대한 전체공사 및 차수공사(2차)에 대한 준공기한 연기 검토보고임.

Ⅰ		관련근거

○ 급수운영과-16667(‘14. 8.27.) : 지장상수도 이설요청 회신

○ 신촌 제2014-231호('14. 9.17.) : 준공기한 연기요청

Ⅱ		공사개요

○ 위    치 : 서대문구 북아현동 267(이대역) ～ 서대문고가전

○ 규    모 : 고가철거(939m), 중앙차로 설치(2.2km)

○ 사업기간 : 2013. 6. ~ 2014. 9.

○ 총사업비 : 9,497백만원

○ 감리사 : (주)동해종합기술공사 외1, 시공사 : 에스트건설(주) 외1

Ⅳ		감리단 보고내용 – 공기연장 사유

○ 신촌로중앙차로및교통구조개선공사

- 경찰청 규제심의 변경에 따른 재설계 결과 보도셋백 및 지장물 증가 등 시공물량 증가로 절대공기 부족

- 신촌로 지하철 환기구 및 상수관로(D500mm)가 저촉되어 이설에 따른 공사기간 연장이 필요한 실정임.

○ 마포로중앙차로및교통구조개선공사

- 경찰청 규제심의 변경에 따른 재설계 결과 보도셋백 및 지장물 증가 등 시공물량 증가로 절대공기 부족

- 아현고가 흔적남기기 조형물 추가 설치 공사기간 연장이 필요한 실정임.

※현재 설계 추진중

○ 준공기한 연기내용 : 도급비 변경없음

- 신촌로 중앙차로 및 교통구조개선공사

구 분	도급금액 (천원)	공 사 기 간		비 고
		당 초	변 경
총 차	5,937,040	2013.06.20. ~ 2014.09.19.	2013.06.20 ~ 2014.10.31	증 42일
2 차	3,689,980	2014.04.18. ~ 2014.09.19.	2014.04.18. ~ 2014.10.31	증 42일

- 마포로 중앙차로 및 교통구조개선공사

구 분	도급금액 (천원)	공 사 기 간		비 고
		당 초	변 경
총 차	3,925,660	2013.06.20 ~ 2014.09.19.	2013.06.20 ~ 2014.10.31	증 42일
2 차	2,449,454	2014.04.18. ~ 2014.09.19.	2014.04.18. ~ 2014.10.31	증 42일

Ⅴ		검 토 내 용

○ 상기 보고내용을 검토한 바 감리단 검토의견 대로 절대공기가 부족하여 공사기한을 연장함이 타당한 것으로 판단되므로 준공기한을 연기하고자함.

Ⅵ		향후 추진일정

○ 2014. 10. 20 : 충정로 중앙차로 공용 개시

○ 2014. 10월말 : 공사 준공 및 인수 인계

붙 임 : 1. 감리검토의견서 1부.

2. 전체분 예정공정표(당초-변경) 1부.(별첨)

3. 2차분 예정공정표(당초-변경) 1부.(별첨) 끝.