문서번호	방재시설부-9023
결재일자	2014.9.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
이정국		서관석	09/17 임춘근
협조
	주무관		임병길

= 탄천물재생센타 복개공원화(4단계) 공사 =

지장물(총인시설 등) 이설방안 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 9.

도시기반시설본부

방재시설부

지장물(총인시설 등) 처리방안 검토보고

= 탄천물재생센타 복개공원화(4단계) 설치공사 =

탄천물재생센타 제2처리장 상부 복개를 위한 PC기둥 설치시 간섭되는 총인시설 관련 지장물(닥트배관, 전선배관 등)에 대한 이설 등 처리방안 검토 보고임

▣ 관련근거

○ 물재생시설과-6310호(2014.05.15) : 지장물 이설 관련 검토결과 통보

○ 탄천2014-417호(2014.08.28) : 지장물(총인시설 등) 이설 및 이설비 요청

▣ 공사개요

○ 공 사 명 : 탄천물재생센타 복개공원화(4단계) 공사

○ 공사규모 : 구조물 복개(면적 36,920㎡) 후 주민 친화공간 조성

○ 공사기간 : 2013. 10. 1. ~ 2016. 09. 29

○ 도 급 비 : 26,154백만원

○ 시 공 사 : 대우조선해양건설(주)외 1

○ 감 리 사 : ㈜유신 외 1

▣ 보고내용

○  지장물(총인시설 등) 저촉(간섭) 현황

- 지 장 물 명 : 총인시설 등(전선배관덕트, 약품배관 등)

- 위       치 : 제2처리장

- 저촉(간섭)개소 : 17개소(복개를 위한 PC기둥과의 간섭)

구 분	저촉 현황	수 량 (개소)	비 고
ㆍ알칼리배관	PC기둥 저촉	2	별첨 #4 및 #5 참조(지장물 현황사진 및 위치도)
ㆍ전선배관덕트	PC기둥 저촉	1
ㆍ수문개폐기	PC기둥 저촉(핸들 방향 전환)	6
ㆍ전기선로덕트 및 약품배관	기둥 접속부(Pedestal) 저촉	3
ㆍ약품배관 및 덕트	중앙통로 부 PC부재 저촉	3
ㆍ약품배관 및 전선배관	타워크레인 설치장비 저촉	2
계		17

○ 지장물(총인시설 등) 이설 추진 경위

- 2014.5.15 : 지장물 이설관련 검토결과 통보(별첨 #1)

▷ 공정확보를 위하여 ㈜탄천환경과 협의 후 이설비 활용 시행

- 2014.7.14 : 지장물 이설방안 검토 요청에 대한 회신(별첨 #2)

▷ 지장물(17개소) ㈜탄천환경에 이설요청

- 2014.8.28 : 지장물(총인시설 등) 이설 및 이설비 요청(별첨 #3)

▷ 이설비 요청 : 89,000천원

▣ 조치의견

○ 상기 보고내용과 같이 제2처리장 상부 복개를 위한 PC기둥 설치시 저촉되는 총인시설 등 일부 지장물(전선배관닥트, 약품배관 등)로 인해 공사 추진이 어려운바 주관부서(물재생시설과) 검토의견에 따라,

○ 고도처리 시설의 기능유지 및 공정관리 확보를 위하여 탄천물재생센타 위탁기관인 “㈜탄천환경”에 이설토록 조치함이 타당하다고 사료되며,

○ 위탁 이설에 따른 소요비용(89,000천원)은 본 공사 ‘14년 시설비 잔여예산(150,000천원)에서 지급 처리코자 함.

첨부 : 별첨(#1 ~ #6) 각 1 부. 끝.