문서번호	정보시스템담당관-11127
결재일자	2014.9.17.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		정보자원관리팀장	정보시스템담당관
최재욱		고보영	09/17 김기병
협조
	민원기획팀장		한정우

- 2014년 방문민원 온라인화 구축 사업 -

사용자 인수테스트 계획

2014. 9.

정 보 기 획 단

(정보시스템담당관)

- 2014년 방문민원 온라인화 구축 사업 -

사용자 인수테스트 계획

방문민원 온라인화 구축 관련하여 시스템 개발 및 내부 통합테스트가 완료되어 사용자 요구기능, 오류여부 등 사용자 인수테스트를 실시하여 시스템 오픈에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		사업개요

기    간 : 2014. 5월 ~ 9월

대    상 : 장례지도사자격증 재발급 등 방문민원 10종 사무

내    용 : 민원처리 건수가 많은 방문민원 10종 민원사무

온라인화 구축

사업추진 : 정보시스템담당관, 시민봉사담당관

Ⅱ		수행절차

사전설명회 (정보시스템담당관)	⇨	인수테스트 (시민봉사담당관 및 부서별 민원담당자)	⇨	최종검사 (정보시스템담당관)

Ⅲ		수행계획

사전설명회

❍ 일 시 : ‘14. 9. 19(금), 10:00 ~ 11:30

❍ 장 소 : 스마트정보지원센터(서소문청사 1동 3층)

❍ 대 상 : 방문민원 관련 업무담당자

❍ 내 용 : 사용자 인수테스트 방법 및 시연

인수테스트

❍ 기 간 : ‘14. 9. 22 ~ 9. 26

❍ 장 소 : 각 근무 사무실

❍ 대 상 : 방문민원 관련 업무담당자

※ 방문민원 관련 민원 및 업무부서 담당자 현황

연번	대상 민원	민원담당부서 (담당자)	업무부서 (담당자)	비 고
1	장례지도사자격증 발급(재발급) 신청	시민봉사담당관 (강희도)	어르신복지과 (박진원)
2	국제물류주선업 등록기준 신고	시민봉사담당관 (김소영)	택시물류과 (박노산)
3	요건면제 수입확인 신청(전기용품)	시민봉사담당관 (최창선)	녹색에너지과 (정춘용)
4	국제물류주선업 등록, 변경등록 신청	시민봉사담당관 (김소영)	택시물류과 (박노산)
5	수입요건확인 면제대상 물품 중 의약품 등의 추천신청	시민봉사담당관 (송기현)	보건의료정책과 (함현진)
6	사료성분등록신청(제조업자용)	동물보호과 (유현지)	좌 동
7	서울특별시여객자동차운수사업법 위반행위 신고포상금 지급 신청	교통지도과 (김종중)	좌 동
8	먹는샘물(먹는염지하수) 수입실적 보고	시민봉사담당관 (최수천)	생활보건과 (왕선정)
9	사료제조업(사료성분) 등록증 재발급 신청	동물보호과 (유현지)	좌 동
10	산지유통인 등록 신청	시민봉사담당관 (강희도)	민생경제과 (김이종)

❍ 내 용

- 사용자의 요구사항이 제대로 반영되어 있는지를 확인

- 프로그램의 기능을 테스트하여 정상동작 확인, 데이터 점검 등

※ 상주 개발인력의 지원하에 인수테스트 시나리오에 의하여 각 민원업무별 담당자가 인수테스트 직접 수행

최종검사

❍ 기  간 : ‘14. 10. 1 ~ 10. 2(예정)

❍ 검사반

- 검사총괄 : 정보자원관리팀장 고보영

- 검 사 자 : 전산6급 최재욱, 전산7급 김대원, 전산8급 양동섭,

전산9급 김혜경

❍ 내  용

- 각종 보고서 및 산출물 확인

- 요구사항 반영여부, 사용자 인수테스트 결과 조치여부 확인 등

※ 검사항목 및 검사내용

검사항목	검 사 내 용	참여자(확인자)
		직급	성 명
성과물 제출 확인	개발 산출물 및 결과물	전산6급 전산7급 전산8급 전산9급	최재욱 김대원 양동섭 김혜경
시스템개발 (12종)	장례지도사자격증 재발급 국제물류주선업 신규등록 신청 국제물류주선업 변경등록 신청 국제물류주선업 등록기준 신청 요건면제수입확인 신청서(전기용품) 수입요건확인 면제대상 물품 중 의약품 등의 추천신청 사료성분등록신청(제조업) 사료제조업 등록증 재발급 사료성분 등록증 재발급 여객자동차운수사업법 위반행위 신고 포상지급 먹는샘물(먹는염지하수) 수입실적 보고 산지유통인 등록 신청

Ⅳ		향후계획

시스템 시범운영   : 2014.10. 2 ~ 10.10

완료보고회 개최   : 2014.10.10.(금), 16:00

시스템 오픈       : 2014.10.10.(금), 17:00

따로붙임 : 사용자 인수테스트 수행보고서 10부.  끝.