문서번호	시설과-5638
결재일자	2014.9.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	시설과장	관리부장	서울대공원장
이강호	공헌구	정상택	09/18 안영노
협 조
	동물원장		노정래
	동물복지과장		이달주
	주무관		이상국

서울대공원 동물사 및 방사장 안전시설 설치공사 시행계획(안)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 9.

서울대공원

(시설과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	기업	:	유 □	(		)		무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 □

서울대공원 동물사 및 방사장 안전시설 설치공사 시행계획(안)

서울대공원 동물사 및 방사장 안전 관련한 위험 요소들에 대해 보수 정비를 실시하여 안전사고 발생을 미연에 방지하고 시설물 관리에도 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추 진 근 거

□ 2014년 서울대공원 시설물 유지관리 및 시설안전 보수 ․ 정비 예산

□ 서울대공원 운영실태 특별감사 지적사항 (‘14.01.20)

□ 동물사 시설물 자체점검 지적사항 (‘13.11.21)

Ⅱ		사 업 개 요

□ 사 업 명 : 서울대공원 동물사 및 방사장 안전시설 설치공사

□ 사업기간 : 2014. 9 ~ 2014. 12

□ 사업금액 : 509백만원(설계용역비 포함)

□ 대    상 : 대동물관 외 5개소

Ⅲ		공 사 계 획

□ 대동물관(344,000천원)

① 코끼리 방사장 통로 출입문 3개소 자동문 설치

- 25,000천원 × 3 = 75,000천원

② 코끼리, 코뿔소 내실 출입문 13개소 자동문 설치

- 코끼리 6,000천원 × 7 = 42,000천원

- 코뿔소 5,000천원 × 6 = 30,000천원

③ 코끼리 훈련용 훈련벽 4개소 설치

- 40,000천원 × 4 = 160,000천원

④ 아프리카 물소 방사장 안전난간 설치(60m)

- 500천원 × 60m = 30,000천원

⑤ 코뿔소 및 아프리카 물소 안전발판 6개소 설치

- 500천원 × 6 = 3,000천원

⑥ 코끼리 유도문 높이 추가

- 200천원 × 20m = 4,000천원

□ 제 3AF관(81,000천원)

⑦ 사자사 관람객 보호난간 설치

- 810천원 × 100m = 81,000천원

□ 황새마을(6,000천원)

⑧ 이중 철재문 및 철제통로(벽, 천정, 바닥 등)설치

- 1식 : 3,000mm × 2,000mm × 2,300mm = 6,000천원

□ 들소사(30,000천원)

⑨ 야외 방사장 격실문을 외부에서 개폐토록 시설개선

- 10,000천원 × 3개소 = 30,000천원

□ 가금사 거점 사무실(30,000천원)

⑩ 옥상방수 공사 필요

- 200천원 × 150㎡ = 30,000천원

○ 현황사진

① 코끼리 방사장 출입문	② 코끼리, 코뿔소 내실 출입문
③ 코끼리 훈련용 훈련벽 설치	④ 물소 방사장 안전난간 설치
⑤ 코뿔소장 사육사 피난 안전발판 설치	⑥코끼리 유도문 높이 추가

○ 현황사진

⑦ 사자사 관람객 보호난간 설치	⑧ 이중 철재문 설치
⑨ 들소사 방사장 격실문 외부에서 개폐토록 시설개선	⑩ 가금사 거점 사무실 누수

Ⅳ		추 진 계 획

□ 설계용역

○ 용 역 자 : 건축사법에 의한 건축사사무소 등록업체

○ 사   유 : 규격이 크고 하중이 무거운 동물사 철제 자동출입문      설치공사(사진①②⑨)및 훈련벽(사진③), 난간 설치공사(사진④      ⑦)는 설계시 다양한 자료수집과 전문적인 지식이 요구되는 공      종으로 설계용역 의뢰 하는 것이 타당할 것으로 판단 됨

○ 용역비용 : 18,000천원

※ 엔지니어링사업대가 기준에 의거 산정

○ 용역기간 : 착수일로부터 30일

○ 계약방법 : 수의계약

□ 공사추진

○ 제한경쟁입찰(지역제한)

- 건설산업기본법 제7조(별표1)에 의한 시설물유지관리업면허를       보유한업체로서 입찰공고일 현재 주된 사업장이 경기도에 소재       한 업체 이어야 하며 입찰일까지 당해 자격을 계속유지한 업체

○ 수의계약(소액)

- 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률시행령 제       25조 제1항 제5호

□ 예산집행(계획)

○ 공원 이용시민 만족도 향상, 동물의 건강 증진 및 종 보존, 공원     안전시설 보수 및 정비. 시설비(100-401-01), 동물사 및 방사     장 안전시설 설치

Ⅴ		추 진 일 정

□ ‘14.  9.   : 설계용역 타당성 심사요청

□ ‘14. 10.   : 설계용역 발주

□ ‘14. 11.   : 공사발주

□ ‘14. 12.   : 준공

Ⅵ		처 리 의 견

□ 위와 같이 공사 추진하여 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함