투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	선사로~고덕지구간 도로확장공사 구간내 암판정 결과보고 승인 통보

1.문서번호 : SMIH-14-37650

2.작성일자 : 2014-09-18 11:09:41

3.제    목 : 선사로~고덕지구간 도로확장공사 구간내 암판정 결과보고 승인 통보

4.내    용 :

가. 선사고덕0420-467(2014.8.5.)호 및 토목부-18017(2014.9.18.)호와 관련임.

나.“선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사”구간내 sta.1+502 ~ 524, sta 1+660~800 구간 절토부 깍기작업중 노출암에 대한 암판정 위원회의 실사결과(2014. 5. 8.)에 따라 암 지반선 표기 및 횡단면도를 작성하여 변경된 수량산출서 및 공사비 증·감 보고한 사항에 대하여 감리단 의견과 같이 승인하였음을 알려드립니다.

다. 아울러, 고덕산 생태육교 구간 깍기작업이 완료되는 시점에 암판정을 재 실시하여 수량을 확정하시기 바랍니다. 끝.

※ 본 결재는 통합사업관리정보시스템 내 행정정보연계를 통하여

수행하는 문서로, 결재 완료 시 통합사업관리정보시스템 을 이용하여

대상현장에 발송처리 됩니다.

주무관							이한규			광역도로과장					09/18 최광무
협조자
시행			토목부-18022									(						)		접수											(						)
우	120-715					서울 중구 덕수궁길 15 서소문청사 2동 3층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화								/전송			02-3708-2599					/													/	대시민공개