문서번호	소방행정과-13263
결재일자	2014.9.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
담당자	장비회계팀장	소방행정과장	소방서장
천완주	김명식	이종환	09/18 代이종환
협 조

- 공사현장 여건변동 및 설계제외 등 기능강화를 위한 -

구조대 증축 및 안전센터 보수보강공사 설계변경 실정보고

2014.  9.

구로소방서

(소방행정과)

현장 여건변동 및 설계제외 등 기능강화를 위한

구조대증축 및 안전센터 보수보강 공사 설계변경 계획보고

구조대 증축 및 안전센터 보수보강공사 시공중 시설 기능강화를 위한 우수·오수 맨홀 및 옥상 활용 로프하강 훈련 등을 위한 사다리 설치 등 설계제외부분의 기능강화와 안전센터 하수관 연장 등 기타타공사에 대한 설계변경 실정보고에 대하여 다음과 같이 검토 변경하고자 함

Ⅰ		공사개요

공  사  명 : 구로소방서 구조대 증축 및 안전센터 보수보강공사

사업대상

부 서 명	위 치	건 물 개 요			준공년월일	외부마감
		층수	연면적(㎡)	대지면적
구로소방서	구로구 경인로 408	3/1층	4,150.73	3,306.00	1992. 5. 2.	대 리 석
119구조대	구로구 경인로 408	2/1층	429.06	3,306.00	2003.10.11.	대 리 석

사업기간 : 2014년 6월 12일 ~ 2014년 9월 30일(111일)

시 공 자 : 효대건설(주) 대표 한상록

도 급 비 : 금309,149,380원

공사개요

- 구조대 증축 : 철근콘크리트 스라브 2층 78㎡

(구조대 창고 1층 15.79㎡, 2층 39㎡, 1층 긴급구조 통제단 현장지휘소 비품창고 23.79㎡)

- 현장대응단 체력단력실 개보수

- 시흥119안전센터 대기실 도배, 차고전면 배수관 교체 및 아스콘 포장

Ⅱ		실정보고사항

관련근거

- 효대건설(주) 효대 14-0902(2014. 9. 15.)호『실정보고서(구조대 증축 및 안전         센터 보수보강 시설물 보수공사) 제출

변경요청사항

공 종	변 경 전	변 경 후
구조대증축	•오수·우수맨홀 및 매립배관 설계 미반영 •옥상 사다리 설계 미반영 - 구조대 로프하강 등 교육을 위한 옥상 활용	•오수·우수맨홀 600*600 2개소 신설 •우수배수관 ø150 L = 6.67m 신설 •오수배수관 ø100 L = 23.64m 신설 •스텐사다리 5.93m 1개소 신설
체력단련실	•계단 및 내부난간 등 인테리어 필름 17㎡	•방화문 등 인테리어필름 17㎡ ⇒ 33㎡(16㎡ 증가)
시흥119 안전센터	•2층 휴게실, 식당휴게실 도배 설계 미반영 •2층 탈의실 도색 설계 미반영 •하수관(THP) 매립 7m	•대기실 등 도배 268㎡ ⇒ 327.7㎡(59.7㎡ 증가) •탈의실 도색 ⇒ 26.79㎡ 물량발생 •하수관(THP) 매립 7m ⇒ 10m(3m 물량 증가)

Ⅲ		예산현황

수궁119안전센터 보수보강 공사 예산현황

(단위:천원)

구 분	예산배정액 (A)	발주금액 (B)	발주잔액 (A-B=C)	계약금액 (D)	낙찰차액 (B-D=E)	집행잔액 (C+E=F)
시 설 비	569,005	489,773	79,232	451,701	38,072	117,304

※ 발주잔액 발생사유 : 소방재난본부 현장대응단 재배치 지시에 의거 승강기 설치를 2015년                             사업으로 변경하고, 현장출동부서 재배치 사업 우선 시행

설계변경 소요예산(가격산정기준 계약내역 단가적용금액)

(단위:원)

공 종	변 경 사 유	변 경 전	변 경 후	증 ․ 감	비 고
계		11,622,499	16,208,869	4,586,370
구조대증축	•기타공사 사다리설치 및 맨홀, 배수관 물량증가	3,706,786	5,695,353	1,988,567

공 종	변 경 사 유	변 경 전	변 경 후	증 ․ 감	비 고
체력단련실	•수장공사 인테리어 필름지 부착 물량증가	3,223,058	3,616,722	393,664
시흥센터	•보수공사 도배 및 하수배관 물량 증가	4,692,655	5,513,106	820,451
재 경 비	•부가세, 보험료, 일반관리비, 이윤 등		1,383,688	1,383,688

계약금액 변경

변경전 계약금액	증감내역	변경후 계약금액	단가산출기준
309,947,780원	증 4,586,370원	314,534,150원	계약내역 단가 및 요율적용(낙찰율 적용)

Ⅳ		검토 및 처리의견

구조대 증축 맨홀 및 배수관 증설

- 건축물의 증축으로 기존건물의 오수 및 하수배관이 증축부분 기초콘크리트    하단으로 매설되어 기능상실에 따른 보수가 불가함으로 매설위치 변경 필요

- 오수 및 하수배관이 건물 뒷면으로 매설되어 정화조 및 배수구 위치까지 매설시

90°각이 발생 배수에 문제가 발생되어 맨홀 신설이 필요함

체력단련실 인테리어 필름

- 내부계단 및 방화문 등 설계 미반영부분 누락으로 오염 등으로 주변 시설과    불일치 미관을 저해함으로 물량증가 신설 필요

시흥119안전센터 진압대장실 도색 및 하수배관 물량 증가

- 2층 진압대장실 및 식당대기실의 도배물량 설계 미반영 환경개선을 위하여 필요

- 외부 우수배관의 막힘현상으로 집중호우시 배수불량으로 후정에서 소방차량    차고 내부로 빗물이 유입

검토의견 : 승인(현황실정보고 내용)

- 상기와 같이 설계변경에 대하여 구조대의 맨홀설치와 체력단련실 및 시흥119안전센터    진압대장 대기실의 도배 등은 개선공사를 통한 직원들의 근무환경을 개선하고, 시설물의    향후 관리유지 등 편리성을 감안 실정보고사항에 대하여 검토한 바, 설계변경 시공하는    것이 적정하다고 판단되어 승인처리 하고자 함.

- 설계변경에 소요되는 예산은 집행잔액(금117,304천원-발주잔액 및 낙찰차액) 사용

- 소방업무 특성상 24시간 상주 근무여건을 감안 직원들의 불편사항 해소를 위한 조기    준공예정임을 감안 선 시공 통보하고 변경계약 등 행정절차에 대하여는 차후 시행    하고자 함.

붙임 1. 현황실정보고서(종이문서) 1부.

2. 기존 건축물 도면 및 변경도서(종이문서) 1부.

3. 설계변경 관련 자료(종이문서) 1부.  끝.