함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	암사정수장 현대화 및 고도처리건설공사 책임감리원 귀하
(경유)
제 목	통합감시제어시스템 CCTV변경설치 승인통보

1. 암사고도(전)2014-266호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 통합감시제어설비 CCTV변경설치 요청건에 대하여 아래와 같이 지시하오니 추후 설계변경에 반영하시기 바랍니다.

가. 건명 : CCTV변경 설치

나. 변경세부내용

설치위치	변경내용	통보내용	비 고
관리동본관	회전형 5대→고정형 9대 아날로그방식→네트워크방식	승인	감시제어분야
고도처리장	회전형 13대→회전형 11대 파노라마형 13대→고정형 14대 아날로그방식→네트워크방식	승인	감시제어분야

다. CCTV변경에 따른 배관 및 배선 시공

- “암사정수장 현대화 및 고도처리 전기공사”의 예산범위내에서 시공

라. 추후 설계변경시 위 사항 반영 적용.

붙임 : CCTV변경설치 방침서 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	서기종		기전설비과장	09/18 서대훈
협조자
시행	기전설비과-6249	(		)	접수		(		)
우	120-030	서대문구 서대문로 94 (합동 27-1)	/
전화	02-3146-1337	/전송	02-3146-1319	/		/	대시민공개