문서번호	조경지원과-10149
결재일자	2014.9.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		조경지원과장
채해바래		09/18 김제중
협조
	주무관		박종천

천호공원 및 길동생태공원 시설물정비공사

준공기한 연기 검토 보고

2014. 9.

동부공원녹지사업소

조경지원과

「천호공원 및 길동생태공원 시설물정비공사 」

준공기한연기 검토보고

천호공원 및 길동생태공원 시설물정비공사 중 수목제거 및 대나무울타리 물량증가 및 족구장 마사토포장 등 추가 공종 발생에 따라 절대공기 부족으로 준공기한을 연기하여 시행하고자 함

1		공사개요	7

위    치 : 천호공원

공사기간 : 2014. 7. 28 ~ 9. 25

도 급 액 : 금96,052,000원(금구천육백오만이천원)

도 급 자 : 성보종합조경(주) 대표 정구헌

2		준공기한 연기	7

연기사유

▷ 수목제거 및 대나무울타리 물량증가 및 족구장 마사토포장 등 추가 공종 발생에 따라 절대공기 부족으로 준공기한 연기

준공기한 변경

▷ 당 초  2014. 7. 28 ~ 2014. 9. 25

▷ 변 경  2014. 9. 25 ~ 2014. 10. 5(10일 연장)

지체상금 부과여부 검토

▷ 연기사유 귀책소재 : 서울특별시 동부공원녹지사업소

▷ 지체상금 부과여부 : 미부과

3		향후계획	7

계약부서(공원운영과)에 변경계약을 요청하고 공기내 공사가 마무리 될 수 있도록 만전을 기하고자 함

붙 임 : 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.