함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	변경계약 요청(‘14년 상수도관 전식방지 공사)

우리사업소에서 시행 중인「‘14년 상수도관 전식방지 공사 」건에 대한 계약기간을 아래와 같이 변경 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

○ 변경내역

구 분	기 존	변 경	비 고
계약금액	288,836,180원	288,836,180원	변경사항 없음
계약기간	2014.5.27 ~ 2014.9.23	2014.5.27. ~ 2014.10.10

- 변경사유 : 관급자재 납품기한 미도래에 따른 절대공기 부족

- 지체금 부과여부 : 미부과

첨부 : 1. 관련 방침서 1부.

2. 합의각서(별도송부) 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	유준영		기전팀장	문용욱		시설관리과장	전결 09/18 이자원
협조자
시행	시설관리과-19511	(		)	접수		(		)
우	158-070	서울 양천구 신정동 319-15 강서수도사업소	/
전화	3146-4018	/전송	3146-4039	/	juncokr@seoul.go.kr	/	대시민공개