함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	변경계약 요청(‘14년 상수도관 전식방지 공사 책임감리 용역)

우리사업소에서 시행 중인「‘14년 상수도관 전식방지 공사 책임감리 용역」건에 대한 계약기간을 아래와 같이 변경 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

○ 변경내역

구 분	기 존	변 경	비 고
계약금액	40,914,000원	40,914,000원	변경사항 없음
계약기간	2014.5.27 ~ 2014.9.24	2014.5.27. ~ 2014.10.10

- 변경사유 : 관급자재 납품기한 미도래에 따른 절대공기 부족

- 지체금 부과여부 : 미부과

첨부 : 1. 관련 방침서 1부.

2. 합의각서(별도송부) 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	유준영		기전팀장	문용욱		시설관리과장	09/18 이자원
협조자
시행	시설관리과-19512	(		)	접수		(		)
우	158-070	서울 양천구 신정동 319-15 강서수도사업소	/
전화	3146-4018	/전송	3146-4039	/	juncokr@seoul.go.kr	/	대시민공개