다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	계약기간연장 의뢰

1. 교통운영과-17356호(2014.9.18) 관련입니다.

2. 2013년 도로교통 안전개선사업 교통신호기공사 감리용역을 아래와 같이 계약기간연장 의뢰합니다.

가. 계약현황

용역명	계약자	계약금액	계약기간	비고
2013년 도로교통안전개선사업 교통신호기공사 감리용역	㈜건영이앤씨 대표 박준범	291.390.000원	2013. 9. 27 ~ 2014. 9. 26

나. 변경내용

변경내용	당초	변경	비고
계약기간 연장	2013. 9. 27 ~ 2014. 9. 26	2013. 9. 27 ~ 2014. 12. 31	계약금액 변경없음

다. 변경사유 : 선행공사 지연으로 인한 신호기공사의 감리용역 계약기한 내

준공 불가(계약기간 연장 귀채 : 서울시)

붙임 : 1. 보고서 1부.

2. 합의각서 1부.   끝.

	교통운영과장
주무관	임원성		신호시설팀장	노희천		교통운영과장	09/19 강진동
협조자	계약2팀장	홍연화
시행	교통운영과-17452	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15 서울시청별관 1동 6층	/
전화	2133-2484	/전송	2133-1053	/	aeioumoum@seoul.go.kr	/	대시민공개