유수율 저조블록 용역시행 추진보고(22차)

주무관	시설관리팀장	시설관리과장		결재
이해승	최명익	09/19 나태산
협 조

문서번호 :	시설관리과-25032

○ 계약자 : ***************

○ 계약일 : ‘14. 03. 31

○ 착수일 : ‘14. 04. 04

○ 준공일 : ‘14. 10. 31

일별	업무추진	협의(업무)내용	중블록	소블록	비고
9. 15(월)	수용가 계량기 분 석	○ 대현산 소블록별 수용가 샘플 측정 데이터 분석 - 대현산 1-1, 1-2 소블록	대현산 1-1 1-2
9. 16(화)	실 제 급수전 확인조사	○ 대현산 1-2중블록 - 65소블록	대현산 1-2	65
9. 17(수)	수용가 계량기 표본조사	○ 수용가 계량기 상태 표본조사 - 대현산 1-1,1-2중블록 (57,58,66,71소블록)	대현산 1-1	57,58,66,71
9. 18(목)	수전내역 분 석	○ 소블록별 수전내역 분석 - 수용가 위치정보 오류분석 중	대현산 1-1, 1-2

일별	업무추진	협의(업무)내용	중블록	소블록	비고
9. 19(금)	주간 공정보고	○ 기초 현장조사 : 26개소 완료 ○ 수압측정 26개중 26개소 완료 - 대현산 1-1 중블록 10개 완료 - 대현산 1-2 중블록 16개 완료 ○ 수용가 계량기 상태여부 표본조사 - 대현산 1-1 중블록 10개 완료 - 대현산 1-2 중블록 16개 완료 • 문제계량기 / 표본조사 ( 497개 / 2,336개 21.2%) ○ 부과량 데이터 위치오류 분석을 위한 소블록별 수전내역 데이터 분석 - 2개 소블록 분석완료 - 현재 대현산 1-3 중블록 경계 분석 진행중 ○ 보고자 : 김동구 과장등 2명 ○ 지시사항 - 야간최소유량측정 최대한으로 시행 할 것 - 수용가 주소 중블록별 불일치 규명 할 것 - 최종보고회 잠정 10월 20일 기준 내실있는 저조블록 원인 규명에 대해 철저히 준비할 것 - 부과량 데이터 위치 오류 조속 분석 필요 - 수용가 계량기 상태 지속 조사 - 유수율 저조 원인분석 및 규명 필요 - 밀폐공간 안전에 유의하여 업무 실행 ․ 안전장비 점검 및 안전교육실시

끝.