투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	시설공사 설계변경(전체17회, 9차2회)시행 및 계약의뢰

1. 「강남순환도로4공구 건설공사」에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고 계약의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공사명 : 강남순환도시고속도로4공구 건설공사

나. 도급비 : 총괄 168,303,000,000원,  9차 39,365,000,000원

다. 공사기간

- 총괄 : 2001. 12. 29 ~ 2016. 5. 19,  9차 : 2013. 3. 13 ~ 2015. 5. 31

라. 도급자 : 임광토건(주) 대표 강용호

마. 예산과목 : 도로계획과, 도로건설, 도시고속도로망확충(도시개발특별회계), 강남순환도시고속도로건설. 시설비 및 부대비, 시설비

바, 설계변경 내역

- 전체 17회

(단위 : 원)

구분	당초	변경	증. 감	비고
총공사비	167,344,000,000	168,303,000,000	증) 959,000,000
도급비	167,344,000,000	168,303,000,000	증) 959,000,000
공사기간	2001.12.29.~2016.5.19	2001.12.29.~2016.5.19	-

- 9차 2회

(단위 : 원)

구분	당초	변경	증. 감	비고
총공사비	39,365,000,000	39,365,000,000	-
도급비	39,365,000,000	39,365,000,000	-	내역변경
공사기간	2014.3.13~2015.5.31	2013.3.13~2015.5.31	-	변경없음

사. 설계변경 사유 :

- 본선교 및 소하JCT UP램프교 가축도 설치

- 본선교 P7 현장타설 말뚝정산

- 본선교 P11,A2 주변 건물조사

- 공사기간 연장에 따른 비목설계 반영 등

붙임 : 1. 설계변경 검토 보고서 1부.

2. 설계변경 내역서(전체17회, 9차2회) 1부.  끝.

	토목부장
주무관	시희식		도시고속도로과장	명경출		토목부장	09/19 노우성
협조자
시행	토목부-18159	(		)	접수		(		)
우	120-715	서울시 중구 덕수궁길 15 서울시청서소문 2별관 3층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	3708-8662	/전송	3708-2599	/	shs9496@seoul.go.kr	/	대시민공개