문서번호	시설관리과-21262
결재일자	2014.9.19.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
박행종		김태식	09/19 代고신석
협조

상수도이설요청에 대한 검토보고

【도림1배수분구 하수관로 종합정비공사(5구역5블록)구간내 상수관로 이설공사】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 9

남부수도사업소

시설관리과

상수도이설요청에 대한 검토보고

【도림1배수분구 하수관로 종합정비공사(5구역5블록) 구간내 상수관로 이설공사】

영등포구청에서 시행중인『도림1배수분구 하수관로 종합정비공사(5구역5블록) 구간내 상수관로 이설공사』에 대한 이설요청에 대한 검토보고드림

관련근거

영등포구청 안전치수과-20038(2014.09.18.)호와 관련임.

「상수관로 이설 착공계 제출」

시공계획서 제출 : **********************

공사개요

공 사 명  :	도림1배수분구 하수관로 종합정비공사(5구역5블록) 구간내

상수관로 이설공사

공사위치  :	영등포구 대림동 697-2

공사기간  :	'14. 06. 12. ~ ‘15. 04. 07.

상수관로 이설일시 : ‘14. 09. 22 18:00 ~ ’14. 09. 23 05:00

상수관로 이설개요 : D=100~200mm, L=7.0m(하수박스 하월 이설)

(제수밸브 1개소 교체, 공기부착 제수밸브 1개 신설)

단수일시 : ‘14. 09. 22(월) 야간 24:00 ~ 익일 01:00 (1시간)

단수세대 : 7세대(대동초등학교 포함)

시공회사 : 만보엔지니어링  대표 김광운

단수계획

연번	단 수 위 치	단수예정일	단수예정시간	단수세대	작업일수
1	1. 대림동 697, 709번지 일대	9월 22일	야간 24:00 ~ 01:00 1시간	7세대	1일

단수세대 급수방안

현장 확인결과 위 단수세대 건물은 7세대이며, 사전 공사 관련 홍보 및 협의를 통해 야간공사를 시행하여 급수불편을 최소화 함.

(단수시간 : 1시간)

홍보계획

단수안내문 배포 및 부착(만보엔지니어링)

- 단수지역에 안내문을 제작하여 공사 1일전 1가구 1매씩 배포

- 벽보용 안내문을 통행이 많은 단수지역 골목입구 및 골목내에 부착

홈페이지 단수안내 게재

- 상수도사업본부 홈페이지 단수안내(남부수도사업소)

민원발생이 많은 영업집 단수안내(만보엔지니어링)

- 음식점, 교회 등 수돗물을 많이 사용하는 영업집은 직접방문하여   단수안내문을 전달하고 사유를 설명.

- 사용할 수돗물을 단수전에 미리 물탱크 등에 받아 충분히 사용토록 안내.

급수차지원(남부수도사업소)

- 단수지역 주민이 급수차 지원요청시 남부수도사업소 보유 급수차로 수돗물 공급

- 단수지역 주민에게 공급할 수 있도록 수돗물 PET병 확보

공사 관계자 비상연락처

구 분	성 명	연 락 처
시공회사	*******	*************
현장대리인	*****	*************
현장소장	*****	*************
감 리 자	******** *****	*************
상수도관리(남부수도사업소)	********	***************

시공참여자

연번	업 무	성 명	주민등록번호	주 소	자격사항
*	*****	***	**************	*****************	****
*	****	***	**************	*******************	****
*	***	***	**************	******************	***
*	***	***	**************	******************	****
*	***	***	**************	*****************	****
*	***	***	**************	********************	****
*	****	***	*************	**************	*****
*	*****	***	*************	********************	******

검토 및 처리의견

영등포구청 도로과는 만보엔지니어링이 단수 홍보계획에 따라 홍보를 차질 없이 진행할 수 있도록 관리 감독하여 급수운영에 지장이 없도록 조치

계획된 시간내에 배수관로 연결작업이 완료 될 수 있도록 철저한 작업계획을 수립하고, 단수시간이 최소화 되도록 자재준비 및 인력, 장비 등 사전확보

조치의견

본 계획을 영등포청 도로과 및 만보엔지니어링에 통보하여 상수도시설 이설공사와 관련하여 단수작업 및 수돗물 공급에 차질이 없도록 조치하고자 함

첨    부 :	1. 시공계획서 1부.

2. 단수안내문 1부.

3. 착공 및 현장대리인 신고서 1부.

4. 상수도관 이설승인조건 1부.

5. 현장 위치도 1부.