문서번호	기전설비과-6316
결재일자	2014.9.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	생산부장
전준원		서대훈	09/22 박용철
협 조

『암사‧강북 고도정수처리 시험운전 용역』

암사‧강북정수센터 고도정수처리 운영요원 교육계획

2014. 09

상수도사업본부

생 산 부

『암사‧강북 고도정수처리 시험운전 용역』

암사‧강북정수센터 고도정수처리 운영요원 교육계획

암사‧강북 고도정수처리시설공사 및 시험운전의 준공시점이 도래함에 따라 시설물의 정확한 인수인계를 통하여 안정적인 정수생산에 기여하고자 운영요원을 대상으로 시설물 교육을 실시하고자 보고 드림

1		고도정수처리 사업개요

구 분	암 사	강 북	비 고
시설규모	고도처리 110만톤/일 (표준처리 160만톤/일)	고도처리 72만톤/일 (표준처리 100만톤/일)
사 업 비	1,688억원	1,206억원
사업기간	’09.10.01~’14.10.30	’10.02.08~’14.10.30
시 공 사	고려개발(주)	대보건설(주)
시운전사	㈜삼천리엔바이오	㈜삼천리엔바이오
공 정 율	약98%	약98%

2		운영요원 교육개요

□ 교육일정 : ’14.09.23 ~ ’14.10.17(16일)

※ 사업소 및 시공업체의 사정에 의해 교육일정이 다소 변경될 수 있음

□ 교육장소 : 암사‧강북정수센터 제어실 및 고도정수처리시설 현장

□ 참석대상 : 각 정수센터 정수과 및 정수시설과 직원

□ 추진방향

◯ 이론교육을 통한 처리시스템의 원리‧공법 교육 및 기술이전

◯ 현장교육의 병행을 통한 시설물 구조, 기능, 유지관리 등의 실무중심 교육

3		교육운영 계획

□ 교육내용

구 분	교 육 내 용
공 정	‣ 잔류 오존량에 의한 오존주입설비 자동‧수동운전 및 오존접촉조 운영 ‣ 활성탄 역세척주기, 운전시간 등 활성탄흡착지 자동운전 방법 ‣ 역세척수 물량에 따른 회수조 운영 방법 ‣ 중계펌프장 착수정 수위에 따른 연동 및 수동운전 방법 등
기 계	‣ 설비별 정상‧비상운전 방법 및 비상시 조치방법 ‣ 평상시 설비의 유지관리를 위한 점검 및 보수방법 기술이전 등
전기/계장	‣ 중앙제어HMI 및 현장FCC 자동 및 수동운전 방법 ‣ 현장 제어반 설치현황 및 호환성 숙지를 위한 현장시연 ‣ 운전모드의 종류 및 수정방법, 이상 발생시 조치요령 기술이전 등

□ 교육시간 : 1일 약3시간씩 교육

◯ 이론교육 : 60분

◯ 현장교육 : 120분

※ 현장 교대근무자를 감안하여 분야별 4회 반복 실시예정

4		기 대 효 과

□ 운영요원 수준에 맞춘 이론‧현장교육의 병행으로 실무에 즉각 활용

□ 1:1 기술이전 방식으로 운영요원 의견 수렴 및 장애요소 파악

□ 교육 후 합동근무를 통한 확실한 시설물 인수인계 추진

5		행 정 사 항

□ 정수센터

◯ 이론 교육장 준비, 교육대상자 교육 참석 독려

□ 감리단 및 시운전업체

◯ 운영요원 교육교재 제작 및 각 분야별 실무기술자 배치

붙임 운영요원 교육일정(암사, 강북) 각1부  끝.