투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	물재생과장
(경유)
제 목	변경계약 체결 통지-제4처리장 송풍동 MCC 교체사업 시행

물재생과-4797(2014.09.18)호와 관련하여 아래와 같이 변경계약이 체결되었음을 통지합니다.

가. 계약건명 : 제4처리장 송풍동 MCC 교체사업 시행

나. 계약금액 : 금42,240,000원(금사천이백이십사만원)

다. 계 약 일 : 2014년  05월  22일

라. 납품기한 : 28일 연장

- 변 경 : 2014년  10월  17일

- 당 초 : 2014년  09월  19일

마. 변경사유 : 설비교체를 위한 정전시간 및 정전으로 인한 방류수질 악화                              최소화 공사계획수립 업무협의 및 시운전 기간 확보

바. 계약업체 : ㈜유성계전

사업자등록번호 137-81-13015

(☎ 032-819-6135)

붙임 : 변경계약서 1부.  끝.

	관리과장
주무관	정은경		관리과장	09/22 김홍덕
협조자
시행	관리과-11277	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울 성동구 자동차시장3길 64(용답동,중랑물재생센터)	/	http://env.seoul.go.kr/water
전화	02-2211-2522	/전송	02-2211-2529	/	pandw1@seoul.go.kr	/	부분공개(7)