문서번호	주거환경과-8280
결재일자	2014.9.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주거환경지원팀장	주거환경과장
고병호	곽석권	09/22 최성태

휘경동(휘경마을) 주거환경관리사업

기반시설 공사비 예산재배정 계획(1차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 9

주택정책실

(주거환경과)

휘경동(휘경마을) 주거환경관리사업

기반시설 공사비 예산 재배정 계획(1차)

동대문구 휘경동(휘경마을) 주거환경관리계획에 따른 전신주 이설공사와 관련, 해당 공사비를 자치구에 재배정하여 원활한 사업추진을 도모하고자 함.(재배정 금액 : 48,641,120원)

사업 개요

○ 위    치 : 휘경2동 286번지 일대

○ 면    적 : 33,960㎡

○ 용도지역 : 제1종 일반주거지역

○ 동수 및 세대수 : 205동 710세대

추진 현황

❍ ‘12. 05. 03 : 주거환경관리사업 대상지 선정

❍ ’13. 12. 19 : 주거환경관리사업계획(지구단위계획) 결정고시

❍ ’13. 12. 24 : 기반시설 실시설계 용역 착수

❍ ’14. 09. 05 : 기반시설 공사비(전신주 이설) 재배정 요청

주요 공공사업

구분	정비계획(안)	추진내용	비고
마을길 개선사업	총 5개 구간 도로 (B=4m ~ 6m, L=49m ~ 119m)	가로의 보행안전성, 편의성, 쾌적성 확보 급경사로 미끄럼방지 포장 등
마을환경 개선사업	배봉산 및 휘경중 경계부 옹벽 정비	토사유출방지 및 화단정비, 노후벽면 개선 등
	노후석축 개선(2개소)	디자인시설물 부착 및 관내학교 재능기부로 미관개선
	나무화단 정비(6개소)	파손된 화단 정비
	전신주 이설(5개소) 및 통신선 정비	보차 통행 방해 및 사고위험 전신주 이설, 복잡한 통신선 정비로 미관 개선	금번사업 추진대상
기타 공공사업	배수시설(4개소)설치	배수 트랜치 확충을 통한 침수피해 예방
	CCTV(5개소) 및 보안등 설치(7개소)	방범 취약지역 CCTV 및 보안등 확충, 조도개선

추진계획

❍ 추진방향 : 주요 공공사업 중 전신주 이설 및 통신선 정비사업 우선 추진

❍ 추진사유

- 현재 휘경동은 기반시설 공사를 위한 실시설계 용역 중이며, 실시설계 완료 후  공사 착공예정(‘14.11)이나,

- 전신주 이설 등은 관련기관과의 연계사업으로써(한국전력공사, 구 건설관리과), 해당기관의 공사일정(‘14.9)에 맞춰 사업이 추진될 수 있도록 소요예산을 우선 재배정하고자 함.

※ 9월중 통신선 정비공사 시 국비 지원이 가능(공사비의 52% 절감)

공종	전신주 이설(5개소)	통신선 정비(구역 내)
추진기관	한국전력공사	동대문구 건설관리과 (미래창조과학부)
추진일정	9.22 ~ 9.30	9.22 ~ 9.30
소요예산	48,641,120(시비)	62,802,260(국비)

예산 재배정 내역

❍ 재배정액 : 48,641,120원

❍ 재배정 내역

(단위 : 천원)

구분	기반시설 공사						합계	비 고
	토목	조경	CCTV	보안등	전신주 이설	통신선 정비 (국비)
공사비	341,278	58,030	118,327	11,227	48,641	-	577,504	′14년도 예산

향후일정

❍ ‘14.  9.  : 전신주 이설 및 통신선 정비공사 시행

❍ ‘14. 11.  : 기반시설 공사 착공(토목,조경 등)

따로붙임 1. 시비 재배정 교부 결정서 1부.

2. 예산재배정 요청공문(자치구) 1부. 끝.