투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	관급자재 납품기한 연기 요청(용두3 빗물펌프장 신설공사)

우리 본부에서 시행 중인 『용두3빗물펌프장 신설공사』에 소요되는 관급자재에 대하여 아래와 같이 납품기한 연기요청 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 요청내용

건 명	계약번호	계약자	계약금액 (원)	납품기한
				당 초	변 경
관급자재 수배전반 구매 의뢰 (용두3빗물펌프장)	12132093200	(주)일산전기	130,000,000	’14. 09. 30	’15. 12. 31
관급자재 계측제어설비구매 의뢰 (용두3빗물펌프장 신설공사)	12132102700	(주)싸이몬	180,500,000
용두3빗물펌프장 전기공사 CCTV 구매의뢰	12132148600	(주)금성보안	34,200,000

나. 연기사유 : 선행공정 지연에 따른 관급자재 사용시기 미도래

다. 계약금액 및 수량 : 변경없음

라. 지체상금 부과여부 : 미부과

따로붙임  1. 납품기한 연기 검토보고서 1부.

2. 납품업체 연기 합의서 각1부. 끝.

	설비부장
★주무관	유영선		시책사업과장	이흥복		설비부장	09/22 代권오식
협조자
시행	설비부-10356	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울시 중구 덕수궁길 15, 2동 2층(서소문동)	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02)3708-8650	/전송	02)3708-8659	/	ysy12290@seoul.go.kr	/	대시민공개