문서번호	급수운영과-18478
결재일자	2014.9.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
급수설비팀장		급수운영과장
김홍준		09/22 장종욱
협조	주무관		강동철
	주무관		양재덕

노후밸브 교체대상 전수조사 계획

2014. 9.

서부수도사업소

(급수운영과)

노후밸브 교체대상 전수조사 계획

2014년 9월 현재 노후밸브 교체실적이 저조한 바, 서대문구, 마포구 관내 교체대상을 전수 조사하여 11월말까지 목표달성 및 예산집행에 만전을 기하고자 함.

□ 현   황

○ 노후밸브 교체대상 수량

(단위 : 개)

구분	구경 (㎜)	계	급수운영과		비 고
			서대문구	마포구
회주철 밸브 (교체대상)	소계	958	535	423
	80	620	353	267
	100	338	182	156
교체수량 (목표)		73	36	37
교체수량 (실적)		24 (32.9%)	8	16	‘14.9.19 기준

○ 예산현액 : 480백만원(집행액 75백만원, 15.63%)

※ 사업소 목표 110개, 예산 720백만원

□ 조사대상

○ 조사대상 : 별첨

- 재개발 재건축 지역은 제외

- 2014년 상수도 GIS DB 정확도개선사업 용역 대상지역은 용역성과 활용

○ 주요조사 내용

- 밸브구경, 재질, 철개 및 변실상태, 포장종류 등

□ 조사 방법 및 일정

○ 조사대상 : 별첨

- 지역담당 및 직반장 합동조사

- 순찰반, 탐지반은 작업지역내 시설물 조사

○ 조사기간 : ’14. 9. 23. ~ 10. 22.(30일간)

○ 조사양식 : 별첨

○ 조사결과를 일일 복명하고 시설물 담당에게 인계

□ 조치계획

○ 교체작업 : 2014.09.23 ~ 11. 30.

- 시설물연간단가 업체로 하여금 공사 시행

○ 교체작업 수량은 예산 한도 내로 하고 초과물량은 2015년 사업에 반영

○ 조사결과 GIS와 상이 내용은 GIS 시스템 수정

○ 조사완료보고 : 2014. 10. 31. 까지

첨부 : 1. 노후밸브 현황. 1부.

2. 2014년 상수도 GIS DB 정확도개선사업 1차 용역성과 자료. 1부.

3. 조사양식 1부. 끝.