투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	2지역 작업지시 10차 실정보고(2회) 승인 통보(2014년 교통신호기 신설 및 보수공사(연간단가)(구로,양천))

1. 대영GE14A-09-11(2014.09.22.)호와 관련입니다.

2.「2014년 교통신호기 신설 및 보수공사(연간단가)(구로,양천)」와 관련하여, 작업지시 10차 실정보고(2회)에 대하여 검토한 결과, 원안대로 승인 통보하오니 작업추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 실정보고사항 승인 (작업지시 10차)

1) 작업내용

연번	작업장소	작업내용	비고
1	구로구 궁동상태공원(보) 외 13개소	1. 보행자작동신호기 신설 2. 잔여시간표시기 설치 3. 신호등 교체 및 현시 개선	규제 처리

2) 작업지시 10차 작업기간 연장 승인

가) 당초 작업기간 : 2014.06.25 ~ 2014.09.19

나) 변경 작업기간 : 2014.06.25 ~ 2014.10.24(35일 연장)

다) 연장사유 : 노면 작업지연에 따른 공기연장

끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
수신자	(주)넥선 현장대리인,대영유비텍(주) 책임감리원
주무관	박태진		기전과장	09/22 代한영호
협조자
시행	기전과-11818	(		)	접수		(		)
우	157-210	서울 강서구 마곡동 67-1(양천로 237)	/
전화		/전송		/		/	대시민공개