문서번호	도시철도건축부-6063
결재일자	2014.9.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공사지원과장	도시철도건축부장
권영수		김창기	09/22 이병석
협 조
	주무관			박병만

우이~신설 도시철도

건축공사 공정회의 결과보고

2014. 9.

우이~신설 도시철도

건축공사 공정회의 결과보고

	주 요 내 용
◯ 차량기지 종합관리동 건축공사는 우선 기능실(지하1층, 지상3층)부터 공사실시(‘14.11월말 인계) ◯ 공구별 책임감리원은 부족한 감리기간을 만회하기 위해 비상주감리원 활용에 동의 ◯ 외부돌출물 슬림화는 9호선 2단계 시공사례를 검토한 후 적용 가능여부 결정 ◯ 내부색채 디자인 자문조건(셈풀시공) 이행을 위해 공구별 비용, 범위 등 협의 예정

Ⅰ		회 의 개 요

□ 일  시 : 2014. 9. 19.(금) 14:00 ~ 15:30

□ 장  소 : 우이신설경전철(주) 회의실

□ 참석자 : 공사지원과장 및 담당 주무관, 우이신설경전철(주), 1~4공구

책임감리원 및 현장대리인

Ⅱ		회 의 내 용

□ 차량기지 종합관리동 건축공사 추진

○ 1공구 자체 공정회의에서 설비공사를 위해 기능실(B1) 및 관제실(3F) 우선 인계요청

○ 인계기한(‘14. 11월말)안에 완료하기 위해 내주(10월초)부터 해당실부터 공사 시행

○ ‘14. 12월말까지 지상 외부마감 공사 완료 예정

→ 시공사 및 감리단은 구체적인 공정계획을 작성하여 제출 요함

□ 2~4공구 건축공사 착공시점

○ 2공구 : L04 - ‘14. 10월말, L05~L07 - ’15. 2~3월

○ 3공구 : 전 정거장 - ‘15. 3월까지 토목공사를 완료하고 건축공사 진행추진

○ 4공구 : L11 - ‘15. 7월, L12 - ’15. 5월. L13 - ‘14. 11월

→ 금년도 착공예정인 정거장 : L04(10월 말), L13(11월)

□ 공구별 건축상주감리원 배치계획

○ 건축상주감리원 등급 조정(감리사 → 감리사보)은 2, 4공구 건축감리회사에서 동의

○ 공구별 책임감리원은 부족한 감리를 효율적으로 배치하기 위해 비상주감리 활용 등에 대해 동의

→ 공구별 감리단은 사업시행자로부터 공정표를 수령(10월중)하여 배치계획서 제출 요함

□ 외부돌출물 슬림화 방안

○ 외부 E/V와 외부출입구 슬림화와 관련하여 자체 구조검토시 자중, 탑승인원 등에 의한

수직하중 및 풍하중 등 횡하중에 의해 단면 규격변경이 불가. (환기구는 슬림화 가능함)

○ 시공사에서 슬림화 공문 통보 요청

→ 9호선 2단계에 실제 시공사례 확인후 적용여부를 결정 요함

□ 내부색채 디자인 자문조건 이행

○ 샘플시공에 대해 시공 정거장, 범위 등을 공구별 협의 할 계획임

→ 샘플시공은 자재발주전 시행해야하고 자문위원의 확인을 받아야 하므로 조속히

샘플시공 계획서를 제출바람

□ L12(보문역) 정거장 외부E/V 관련 추진

○ 5번출입구 계단 선형 및 E/V 위치 조정을 검토하였으나, 시공사는 위치를 변경하여도

민원인이 반대하고, 도시철도공사 협의 등에 시간이 지연되므로 현재 설계대로 공사추진 예정

→ 외부 E/V 설치가 관건이므로 설치가 관철된다면 개선안의 반영여부는 사업

시행자와 시공사가 판단할 것

Ⅲ		향 후 계 획

□ 2, 4공구 건축상주감리원 배치 관련 관계자 회의

○ 공구별 감리배치방법이 상이하므로 정거장 공정계획이 확정되면 감리투입계획에 대하여

책임감리원, 건축감리원 등 관계자  회의를 통해 통일안 마련

□ 외부돌출물 슬림화 방안 검토 및 요청 공문 사업시행자에게 통보

첨  부 : 회의사진 1부. 끝.