문서번호	시설보수과-3655
결재일자	2014.9.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
최태석		박춘배	09/22 정진오
협 조

준공기한 연기보고

[옥수.금호터널 보도차단벽 설치공사 실시설계용역]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 9.

성동도로사업소

(시설보수과)

준공기한 연기보고

우리 사업소에서 추진중인 ‘옥수.금호터널 보도차단벽 설치공사 실시설계용역’을 시행 함에 있어, 준공기한 연기사유가 발생하여 이에 대한 검토 보고임

Ⅰ		사업개요

사 업 명 : 옥수.금호터널 보도차단벽 설치공사 실시설계용역

사업기간 : 2014.04.01. ~ 2014.09.27.

용 역 비 : 55,344천원

용 역 사 : ㈜삼보기술단

Ⅱ		준공기한 연기

사  유

- 서울시민디자인위원회 심의결과(조건부동의-‘14.07.16.)에 대한 조치계획에 대하여 재상정(재심의) 대상으로 통보(’14.09.12.) 되었기에, 그에 따른 제반 절차(교통소통대책 자문 등)를 수행하기 위한 절대 공기 부족

기  간

- 당초 준공기한 : 2014.09.27

- 변경 준공기한 : 2014.11.26(60일 연장)

관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제90조

지체상금 부과여부 : 미부과

Ⅲ		조치의견

상기 보고내용과 같이 본 용역의 내실을 기하기 위하여 상기와 같이 준공 기한을 연기하고자 하며, 공사발주를 위하여 후속절차 수행과 별개로 설계자문 및 특정제품선정위원회 심사안으로 내역서를 제출 받아 계약 절차를 이행하고, 추후 심의와 자문 결과에 의거 보완 준공하고자 함.

붙임  관련 공문 1부. 끝.