문서번호	건축부-11348
결재일자	2014.9.22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		문화시설과장	건축부장
소영수		정진수	09/22 김우성
협조	주무관		이종근
	주무관		곽용길

「서울 재사용플라자 조성사업」

실시설계 VE 워크샵 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 9.

도시기반시설본부

건  축  부

「서울 재사용플라자 조성사업 실시설계 VE」

워크샵개최 결과 보고

『서울 재사용플라자 조성사업』추진과 관련 설계의 경제성 검토를

위한 실시설계 VE 워크샵을 개최하고 결과를 보고

□ 실시설계 VE 워크샵 개최

○ 일     시 : 2014. 09. 04(목)  14:00~15:30

○ 장     소 : 도시기반시설본부 3층 대회의실

○ 안     건 : 서울재사용플라자 실시설계 VE 워크샵

- 성능모델 작성 / 기능분석 / 아이디어 도출

○ 참 석 자

- 외부 TF 위원 : 건축사사무소 하제 소장 조민수·팀장 손정훈, 한백  건축사사무소 소장 김진한, 티섹구조엔지니어링 소장 김상식, 동성엔지니어링 대표 이강운, ㈜범창 상무 소재림, ㈜이산 전무 곽노진, 대한건설적산사무소 대표 신광수

- 도시기반본부   : 문화시설과장 정진수, 소영수 주무관, 박영동 주무관,

이민영 주무관, 김현지 주무관

열빛총괄과 이종근 주무관, 곽용길 주무관

- 설   계   자  : 삼우건축 최덕용 부소장 외 참여설계사

□ 진행내용

○ 사전검토 내용 토의

○ 추가 아이디어 도출

□ 워크샵 실시 결과

구분	건축 계획	건축 시공	건축 구조	토목	기계	전기	적산	계
아이디어	9	-	3	2	11	3	8	36
설계보완	5	2	4	2	15	12	-	40

※ 아이디어 및 설계보완 제출내용 첨부문서 참조

□ 처리의견

○ 실시설계 VE 워크샵에서 제출된 아이디어 구체화 및 설계보완 사항에 대하여 설계사 검토결과를 실시설계 이행회의시 반영여부를 검토하고자 함

□ 향후 계획

○ 2014. 09.05       워크샵 결과 설계사 송부

○ 2014. 09.05~15  아이디어구체화 및 설계보완 사항 설계사 검토

○ 2014. 09.16       실시설계 이행회의

○ 2014. 09.26       실시설계 VE보고서 작성

따로 붙임 : 1. 실시설계 VE WS 결과보고 1부.

2. 실시설계 VE 참석자명단1부.