함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	구의정수장 월계배수지 계통 관련 시운전을 위한 급수운영 검토 통보

1. 고도정수반-3601호(2014.8.7.) 및 배수과-6151호(2014.9.22.)와 관련입니다.

2. 우리본부에서 시행 중인『구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사』가 2014. 12월 완료될 예정임에 따라 구의정수장 월계배수지 계통 시운전을 위한 시설물점검(밸브류 등), 담수 및 세척작업 등 급수운영 검토결과를 붙임과 같이 통보하니 급수운영 추진계획이 원활하게 진행될 수 있도록 관련부서는 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

◈ 밸브 등 시설물 자체 점검으로 정상 작동될 수 있도록 준비

- 기  간 : ’14. 9.23(화) ~ 10.3(금)

- 점검자 : 수도사업소(중부, 동부, 북부)

- 내  용 : 월계배수지 송수관로 및 변류시설물 정상 작동 확인

◈ 월계배수지 송수관로 퇴수밸브 설치(긴급)

- 개  요 : D=900㎜, L=30m

- 기  간 : ’14. 10.15(수)

- 추진부서 : 중부수도사업소

◈ 향후 일정

- 담수작업 : 시설물 작동에 이상이 없을 시 관련부서 협의 후 시행

- 세척작업 : 관련부서 협의 후 시행(’14.10.15 ~ 10.31 예정)

붙임 : 검토 보고서 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	기전설비과장,고도정수반장,중부수도사업소장(시설관리과장),동부수도사업소장(급수운영과장),동부수도사업소장(시설관리과장),북부수도사업소장(급수운영과장),구의아리수정수센터소장(정수시설과장)
주무관	김진성		배수과장	이임섭		급수부장	09/22 이상홍
협조자
시행	배수과-6197	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1435	/전송	02-3146-1429	/	kjs3386@seoul.go.kr	/	대시민공개