문서번호	공공개발센터-7629
결재일자	2014.9.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	공공설계팀장	공공개발센터장
김혜경	조용기	09/22 이성창

설계변경 검토보고

- 수색역등 철도역세권 개발가이드라인 수립 -

2014. 9

도시계획국

(공공개발센터)

수색역등 철도역세권 개발가이드라인 수립 -

설계변경 검토보고

「수색역등 철도역세권 개발가이드라인 수립」용역 추진과정에서 일부 정산사항이 발생하여 설계변경 조치코자 함.

1		과업개요

□ 과 업 명 : 수색역 등 철도역세권 개발가이드라인 수립

□ 용역기간 : 2013. 8. 5 ～ 2014. 9. 30 (14개월)

□ 계약금액 : 254백만원

□ 수행기관 : ㈜아키플랜종합건축사사무소 + ㈜동림피앤디

□ 과업내용

○ 수색역 일대 개발 가이드라인 및 도시설계(안) 마련

○ 창동차량기지 전략적 개발 기본구상(안) 정비

○ 교통 등 각종 부영향 저감 및 환경 개선방안 제시

2		설계변경 내용

□ 설계변경 사유 : 직접 경비항목 중 자문비 잔액발생에 따른 정산으로 계약금액 조정 시행

□ 설계변경 금액

○ 당 초 : 254,000천원

○ 변 경 : 249,370천원 (감 4,630천원)

(단위 : 원)

공 종	당 초	변 경	증 감
인건비	80,837,110	80,837,110	-
직접경비	26,800,000	22,591,180	감)4,208,820
제경비	89,253,799	89,253,799	-
기술료	34,018,182	34,018,182	-

※ 계약기간 및 과업내용은 변경없음.

3		조치계획

□ 계약자인 ㈜아키플랜건축사사무소외 1인과 변경계약 처리코자 함.

따로붙임 : 설계변경 내역서 1부. 끝