문서번호	공원조성과-10995
결재일자	2014.9.22.
공개여부	부분공개
방침번호

				시 민
주무관	생활공원팀장	공원조성과장		푸른도시국장
김태순	유영봉	오순환		09/22 오해영
협 조	공공개발센터장		이성창
	건축부장		김우성

『마포석유비축기지 재생 및 공원화 사업』

기본 및 실시설계 용역 시행 계획

2014.  9.  .

공 원 조 성 과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

『마포석유비축기지 재생 및 공원화 사업』

기본 및 실시설계 용역 시행 계획

경제성장기의 산업유산인 석유비축기지를 친환경 문화공간으로 재생․활용하기 위한 『마포석유비축기지 재생 및 공원화 사업』의 기본 및 실시설계용역을 아래와 같이 추진코자 함

□ 사업개요

○ 위    치 : 마포구 성산동 산53-1 일대

○ 규    모 : 101,510㎡ (완충녹지 258,526㎡ 중 일부)

－ 유류저장탱크 및 옹벽 5기, 임야 등

○ 사 업 비 : 41,253백만원

○ 사업기간 : '13. 3. ~ '16. 12

○ 사업내용 : 친환경․재생의 복합문화공간 및 공원 조성

－ 석유탱크 5기를 생태․환경․문화 체험공간으로 활용 및 재생

－ 탱크 등 시설 및 외부공간 활용을 위한 콘텐츠 및 프로그램 제시

－ 건축 및 외부 공간계획(공간 구성, 보행․차량 동선, 식재․포장 등 공원조성계획 등)

□ 추진현황

○ '12. 9. 1.  : 시장님 현장답사

○ '12.10.     : 마스터플랜 수립 용역 심의 / 투․융자사업 심사

○ '13. 3. 7.~'14. 4.29. : 마스터플랜 수립 용역 시행

○ '13. 5.14.~10. 8. : 시민, 학생, 전문가 아이디어 공모 및 심사, 시상

○ '14. 5.20.~ 8.12. : 국제현상설계공모 (95팀 접수)

○ '14. 8.23. : 당선작 발표

－ 당선자 : ㈜알오에이건축사사무소, 한양대학교 허서구 교수, ㈜팀텐건축사사무소

□ 설계용역추진계획

○ 용 역 명 : 마포석유비축기지 재생 및 공원화사업 기본 및 실시설계용역

○ 용역금액 : 금1,590,000,000원 - 부가세 포함

(총액계약, 장기계속용역, 2014년 1,418백만원, 2015년 172백만원)

○ 용역기간 : 착수일로부터 270일(공휴일 포함)

○ 용역내역 : 과업내용서 참조

－ 마포석유비축기지 재생 및 공원화 사업 기본 및 실시설계(건축, 조경, 토목 등)

－ 공원조성계획 결정을 위한 자료작성 등 (도시관리계획변경용역 별도 시행 예정)

○ 계약방법 : 설계공모 작품심사 결과 당선된 업체와 수의계약

○ 계약상대자(대표) : ㈜알오에이건축사사무소  대표 백정열 (☎ 02-417-0142)

서울시 강남구 선릉로82길 25 삼정빌딩 4F

○ 추진일정

－ 2014. 9.19. 용역추진 방침수립

－ 2014. 9.23. 계약의뢰

－ 2014. 9.29. 용역계약 및 착수

－ 2015. 6.30. 용역준공

○ 예산과목 : 도시개발특별회계

－ 공원조성과 : 생활권공원확충, 도심공원확충, 마포석유비축기지 재활용사업, 시설비

－ 공공개발센터 : 도시개발의 공공성확보, 도시발전 및 공공개발, 마포석유비축기지 재활용사업, 시설비

□ 예산사용계획

(단위:천원)

마포석유비축기지 재활용 사업 (도시개발특별회계)		`14년 세부 사용 계획 (단위사업내)			비 고
		변 경 전	변 경 후	증 감
합 계		1,590,000	1,590,000	-	시 설 비
설 계 비 계		1,590,000	1,418,000	감 172,000	부족분 2015년 확보
공공개발센터	설 계 비 (본예산)	125,000	125,000	-	-
공원조성과	설계비(명시이월 예산)	1,465,000	1,293,000	감 172,000	발주 예정 (장기계속용역)
	전략환경영향평가	-	80,000	증 80,000	발주 완료
	사전재해영향성검토	-	40,000	증 40,000	발주 완료
	도시관리계획변경	-	22,000	증 22,000	발주 예정
	설계자문위원회 운영 등	-	30,000	증 30,000	집행 예정

□ 향후계획

○ 설계 예산 재배정 요청(공원조성과 → 공공개발센터)

○ 설계용역 계약 및 시행

○ 도시관리계획변경용역 시행

붙임 : 1. 위치도 및 사진 1부.

2. 국제현상설계공모 시행계획 1부.

3. 국제현상설계공모 심사결과 보고서 1부.

4. 용역설계서 및 과업내용서 1부.  끝.