문서번호	토목부-18343
결재일자	2014.9.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
정문수		최광무	전결 09/23 노우성
협조

지반 개량(치환) 계획보고

(남부순환로~오정대로간 도로개설공사)

2014.  9.

서울특별시도시기반시설본부

( 토  목  부 )

지반 개량(치환) 계획보고

( 남부순환로~오정대로간 도로개설공사 )

기존 수로(퇴적 지반)구간을 지반개량(치환)하여 지지력 확보로 도로 침하를 사전 예방하고자 보고드림.

※ 설계변경 현황 : 기존 수로 지반 개량 1,799㎥,  소요예산 : 34백만원

□ 공사개요

◦ 공 사 명 : 남부순환로~오정대로간 도로개설공사

◦ 규    모 : 도로개설40m(8차로),  연장1.23km

◦ 공사기간 : 2010. 9.29 ~ 2014.10. 7

◦ 도 급 비 : 10,000백만원

◦ 시 공 사 : 보훈종합건설(주)

◦ 감 리 사 : (주)수성엔지니어링

□ 보고내용

◦ 본 공사의 기존 수로 구간의 퇴적지반의 도로개설시 지반 지지력 확보 및 침하 예방을 위하여 사석 치환 후 설계변경시 반영이 필요한 실정임.

(80.6m) (78m)

□ 감리단 검토 의견

◦ 본 공사구간 중 기존 수로구간(STA.NO.0+220, 390) 퇴적지반의 지반 지지력 확보 및 침하 문제 해결 방안으로 경제성 및 공기 단축을 위하여 사석(구입암)을 투하하여 강제 치환(기술지원감리원 검토) 후 양질 토사로 되메우기 하는 것이 가장 적정하다고 판단됨.

◦ 기존 수로 퇴적지반 처리 공사비 비교

(단위 : 원)

공 종	규 격	단위	단 가	공 사 비 검 토
				① 사토처리 후 양질토사 되메우기		② 운반암 성토 후 양질토사 되메우기		③ 구입암 성토 후 양질토사 되메우기
				수량	금액	수량	금액	수량	금액
사토처리	퇴 적 토	M3	13,785	514	7,085,490
순 쌓 기	퇴적지반	M3	4,515	571	2,578,065
순 쌓 기	누 락 분	M3	4,515	1,428	6,446,417	971	4,384,065	971	4,384,065
되메우기 및 다짐	기계100%	M3	4,906	1,799	8,825,894	1,799	8,825,894	1,799	8,825,894
물 푸 기	기존수로	HR	13,897	15	208,455	15	208,455	15	208,455
사석운반	L=38.7km (구리암사연결)	TON	12,274		-	1,089	13,366,386
사 석	0.01~0.03㎥	TON	9,275		-		-	1,089	10,100,475
순공사비		식			25,144,321		26,784,800		23,518,889
간 접 비		식			11,255,679		12,015,200		10,171,111
도 급 비					36,400,000		38,800,000		33,690,000
검 토 결 과				-		-		적 용

◦ 수량 변경 내역

구 분		규 격	단위	당 초	변 경	증.△감	비 고
1.토공	순 쌓 기	토 사	M3	-	971	971
	되메우기 및 다짐	기계100%	M3	-	1,799	1,799
	물 푸 기	기존수로	HR	-	15	15
	사 석	0.01~0.03㎥	TON	-	1,089	1,089

◦ 공사비 변경 내역

(단위 : 천원)

공 종	당 초	변 경	증·△감	비 고
1. 토 공
- 기존수로 퇴적지반 처리	-
순 쌓 기	-	4,384	4,384
되메우기 및 다짐	-	8,826	8,826
물 푸 기	-	209	209
사 석	-	10,100	10,100
직접공사비	-	23,519	23,519
간접공사비	-	10,171	10,171
도 급 액	-	33,690	33,690
관급자재대	-	-	-
총 공사비	-	33,690	33,690

※ 신규단가 협의율 적용 : 92.75% (낙찰률 85.515%)

□ 조치계획

◦ 상기와 같이 기존 수로 퇴적지반 개량에 대하여 원활한 공사 추진을 위하여 우선 승인하고 향후 본부 설계변경위원회 심의 결과에 의거 설계변경시 반영하고자 합니다.

첨부 : 감리단 검토 의견서 1부.  끝.