문서번호	시설과-6622
결재일자	2014.9.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	중부공원녹지사업소장
이동헌		함석주	09/23 이용태
협조
	주무관		남상국

시립비전트레이닝센터 녹색자금사업

준공기한 연기 검토 보고

2014. 9.

중부공원녹지사업소

시설과

시립비전트레이닝센터 녹색자금사업

준공기한 연기 검토 보고

시립비전트레이닝센터 녹색자금사업 추진중 기상악화 및 추석연휴 등 현장여건에 따라 공사기간을 연장하고자 검토 보고드림.

□ 공 사 개 요

○ 공 사 명 : 시립비전트레이닝센터 녹색자금사업

○ 위    치 : 성동구 자동차시자길 48 시립비전트레이닝센터

○ 공사기간 : 2014. 8. 1 ~ 10. 2

○ 도 급 액 : 139,609,400원

○ 도 급 자 : ㈜동양 대표자 정성수

□ 준공기한 연기

○ 연기기간

- 당  초 : 2014. 7. 30 ~ 2014. 9. 27

- 변  경 : 2014. 7. 30 ~ 2014. 10. 17

○ 연기사유 : 공사기간 중 기상악화(우천-총19일)와 추석연휴 등으로 정상적인 공사일정에 차질이 발생하여 절대공기 부족

○ 지체상금 부과여부 검토

- 연기사유 귀책소재는 중부공원녹지사업소, 지체상금은 미부과

□ 보고의견

○ 상기와 같이 준공기한을 연기하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

첨부: 준공기한연기의뢰서 1부.  끝.