문서번호	설비부-10444
결재일자	2014.9.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시책사업과장	설비부장
유영선		이흥복	09/23 代권오식
협조

『중동빗물펌프장 외 2개소 전기공사 감리용역』

준공 연기 및 2차 발주계획 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 09.

도시기반시설본부

[설 비 부]

『중동빗물펌프장 외 2개소 전기공사 감리용역』

준공 연기 및 2차 발주계획 검토 보고

우리 본부에서 시행 중인 『중동빗물펌프장 외 2개소 전기공사 감리용역』준공기한 연기 및  2차분 감리용역 발주를 위한 검토 보고임.

공사개요

○ 공 사 명 : 중동빗물펌프장 외 2개소 전기공사

○ 규    모

- 중 동 : 수배전반 개량 1,500KVA×2대,

- 합 정 : 수배전반 개량 2,000KVA×2대,

- 용두3 : 수전전력 499KVA

○ 공사기간 : 2013.04.15~2014.09.30.(1차 ‘13.04.15~‘14.09.30)

○ 시 공 사 : ㈜한울전력 대표 유인철

○ 감 리 사

- 중동 및 합정 : ㈜건창기술단 대표 김영규

- 용두3빗물펌프장 : ㈜한양티이씨 대표 김현득

관련근거

○ ㈜건창기술단 건기단 제2014-006(2014.09.22)호 준공기한 연기 및 2차 계약요청

○ ㈜한양티이씨 한양 공 14-092201(2014.09.22.)호 용두3빗물펌프장 신설 전기공사 감리용역 계약연장 요청

검토내용

○ 연기사유

- 중동빗물펌프장 : 선행공종인 지장수목 이식지연 등 건축공사 지연에 따른 선행공정 준공기한이 연기되어 후속공종인 전기공사의 지연,

- 용두3빗물펌프장 : 전면 재설계에 따른 전기공사 실 착공 지연,

- 합정빗물펌프장 : 지장건물이 수용(수용개시 : 2014. 9. 10)되고, 건물철거 후 선행공정 공사착수 예정에 있어 전기공사 실 착공 지연으로 절대공기가 부족

○ 중동 및 합정빗물펌프장 감리용역 – 계약업체 : (주)건창기술단

차 수	계약금액(원)	계약기간 변경		비고
		당 초	변 경
총 차	144,422,930	‘13.05.15.~‘14.10.31	‘13.05.15.~‘16.04.30	547일 연장
1 차	23,000,000	‘13.05.15.~‘14.09.30	‘13.05.15.~‘14.09.30	변경없음
2 차	31,880,800	착공일로부터 2015.04.30까지		금차 발주
장래차	89,542,130

○ 용두3 빗물펌프장 감리용역 – 계약업체 : (주)한양티이씨

차 수	계약금액(원)	계약기간 변경		비고
		당 초	변 경
총 차	38,472,350	‘13.05.20.~‘14.10.31	‘13.05.20.~‘16.02.28	485일 연장
1 차	23,000,000	‘13.05.20.~‘14.09.30	‘13.05.20.~‘15.06.30	273일 연장
장래차	15,472,350

조치의견

○ 전기공사 준공기한이 연기됨에 따라 상기와 같이 감리용역을 연기하여 공사관리에 만전을 기하고자 하며, 계약변경 및 계약의뢰하고자 함.

따로붙임 : 1. 준공기한 연기요청 및 2차 계약요청 1부.

2. 용두3빗물펌프장 감리용역 계약요청 공문 1부. 끝.