투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	준공기한연기 의뢰(시립비전트레이닝센터 녹색자금사업)

1. 시설과-6622(2014.9.23)호와 관련입니다.

2. “시립비전트레이닝센터 녹색자금사업”의 준공기한을 다음과 같이 연기하고자 하니 조치 하여 주시기 바랍니다.

가. 공사현황

- 공 사 명 : 시립비전트레이닝센터 녹색자금사업

- 공사기간 : 2014. 8. 4 ~ 2014. 10. 2

- 도 급 비 : 금139,609,400원

- 도 급 자 : (주)동양 대표 정성수

나. 준공기한 연기

공 사 명	계약일	착공일	준 공 기 한		비 고
			당 초	변 경
시립비전트레이닝센터 녹색자금사업	‘14.8.1	‘14.8.4	‘14.10.2	‘14.10.17

다. 연기사유 : 공사기간 중 기상악화(우천)와 추석연휴 등으로 절대공기 부족

첨부  1. 방침서 1부.

2. 준공기한연기의뢰서 1부.  끝.

	시설과장
주무관	이동헌		주무관	남상국		시설과장	09/23 함석주
협조자
시행	시설과-6632	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울특별시 중구 삼일대로 231 남산별관2층	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02)3783-5919	/전송	02)3783-5969	/	oil0824@seoul.go.kr	/	대시민공개