투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	변경계약 체결 - 2014년 한강공원 야외수영장 시설물 보수공사

1. 기전설비2과-4043(2014.9.23.)호와 관련입니다.

2. 기전설비2과에서 시행하는『2014년 한강공원 야외수영장 시설물 보수공사』건에 대하여 다음과 같이 변경계약을 체결하고자 합니다.

가. 계약현황

계 약 명	계약업체(대표자)	계약금액(원)	공사기간
2014년 한강공원 야외수영장 시설물 보수공사	주식회사 승화프리텍 (******)	1,331,838,830	2014.4.7. ~ 2014.9.30.

나. 변경내역 : 계약금액 변경(증 21,733,170*), 준공기한 변동없음

구분	계 약 명	계약업체	계약금액(원)	공사기간
변경 전	2014년 한강공원 야외수영장 시설물 보수공사	주식회사 승화프리텍 (******)	1,331,838,830	2014.4.7. ~ 2014.9.30.
변경 후	2014년 한강공원 야외수영장 시설물 보수공사	주식회사 승화프리텍 (******)	************* **************	2014.4.7. ~ 2014.9.30.

다. 변경사유 **보수 물량 증가에 따른 설계 변경(여의도 수영장                               수조벽체 보수 등)

붙임 :  1. 변경계약 의뢰 및 시행공문 각 1부.

2. 설계변경 검토보고서 1부.

3. 변경내역서 1부.

4. 설계변경 관련 시설관리공단 공문 각 1부.

5. 추가작업 전후 사진 1부.

6. 합의각서 1부.  끝.

주무관	이재승		총무과장	최대봉		총무부장	전결 09/23 서영관
협조자	주무관	권혁제
시행	총무과-14385	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울 성동구 강변북로 257	/
전화	02-3780-0723	/전송	02-3780-0740	/	existwin@seoul.go.kr	/	부분공개(5)