문서번호	기전설비과-6426
결재일자	2014.9.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	생산부장
전준원		代유통희	09/24 박용철
협 조

『암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사』

관리본관외 4개동 환경이미지 공정 삭제외 1건 실정사항 검토보고

2014. 09.

상수도사업본부

생 산 부

『암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사』

관리본관외 4개동 환경이미지 공정 삭제외 1건 실정사항 검토보고

암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사와 관련하여 관리본관외 4개 시설동의 환경이미지 공정 삭제외 1건에 대한 감리원의 실정보고를 검토하고 그 결과를 보고드림

1		공 사 개 요

◯ 공 사 명 : 암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사

◯ 사 업 비 : 금1,688억원(도급비 636억원)

◯ 위    치 : 서울시 강동구 고덕동길 131-1

◯ 사업규모 : 고도정수처리시설(110만톤/일), 환경이미지 개선 1식

◯ 시 공 사 : 고려개발(주) 대표이사 김종오

◯ 감 리 사 : 범한엔지니어링 대표 최창희외 1개사

◯ 공 정 율 : 약98%(’14.09.24 현재)

2		실정보고내용

□ 관리본관외 4개동 환경이미지 개선 일부공정 삭제

◯ 관리본관동 옥외에 설치될 예정인 음수대를 조경분야에서 기설치하여        기계분야 내역에 반영된 음수대 배관설치 불필요

◯ 당초 시설현대화 사업(2취수장외 3개소의 화장실 개선공사)의 계획변경

- 관련근거 : 고도정수반-7146호, 시설현대화 관련 내부시설변경 실정보고

- 변경내용 : 리모델링 대상건물의 화장실을 수질계측기실 또는 사무실로 용도                     변경하여 사용승인(암사 요청사항)

□ 활성탄흡착지 전기실 냉방기 추가설치

◯ 활성탄흡착지 전기실에 설치될 냉방기가 도면과 내역서간 상호 상이

◯ 전기실 내부 제어용 RCS판넬의 하절기 오작동 방지를 위하여 냉방기의        설치가 필요

□ 공사비 증‧감현황

◯ 소요예산 : 약26,511천원 감액

◯ 산출내역

구 분	당 초	변 경	증감	비고
직접공사비	23,296	5,448	-17,848
제경비	5,314	1,242	-4,072
부가가치세	2,861	669	-2,192
E/S 1차	1,045	244	-801
E/S 2차	1,050	246	-804
E/S 3차	1,037	243	-794
합계	34,603	8,092	-26,511

3		조 치 계 획

◯ 관리본관외 4개동의 환경이미지 개선공사와 관련하여 기시공된 부분        및 건물 내부실 용도변경에 따른 설치공정 감액 또는 삭제

◯ 활성탄흡착지의 전기실 유지관리를 위한 냉방기의 추가설치가 타당하여        내역서에 누락된 1대 반영

4		행 정 사 항

◯ 책임감리원은 추후 정산시 설계변경 및 계약금액 조정

◯ 기존품목은 기존단가를 적용하고 신규단가는 협의율 단가(83.95%)를 적용

붙임 감리원 실정보고서 1부.  끝.