함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	영등포아리수정수센터
수신자	정수시설과장
(경유)
제 목	변경계약체결 (통보)(풍납취수장 펌프기동반 기기변경)

1. 정수시설과-6156(2014.9.22)호와 관련입니다.

2. 귀 부서에서 의뢰한 사업계약건에 대하여 아래와 같이 변경계약 체결하였음을 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 변경계약 내역

계약건명	계약금액(원)	변경계약체결일	납품일자	사 유
풍납취수장 펌프기동반 기기변경	28,032,770	2014.9.24	2014.9.20.→ 2014.10.20	선행공사인 펌프설치공사의 공사지연으로 펌프기동반기기의 납품기한 연기

따로붙임 : 변경계약서 1부.  끝.

	영등포아리수정수센터소장
주무관	김은경		행정관리과장	안창수		영등포아리수정수센터소장	09/24 임정규
협조자
시행	행정관리과-6690	(		)	접수		(		)
우	150-110	서울특별시 영등포구 노들로 11	/
전화	02-3146-5611	/전송	02-3146-5691	/	archiyou@seoul.go.kr	/	대시민공개