문서번호	사회적경제과-10156
결재일자	2014.9.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	협동조합정책팀장	사회적경제과장
조아름	김설희	09/24 代김설희

서울시 사회적경제 조직 실태조사 및 분석 용역

계약기간 연장 계획

2014. 9

사회적경제과

(협동조합정책팀)

서울시 사회적경제 조직 실태조사 및 분석 용역

계약기간 연장계획

실태조사의 실효성을 확보하고 결과분석 및 연구에 대한 완성도를 높이기 위해 계약기간을 연장하고자 함

1		계약현황

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 서울시 사회적경제 발전계획 수립을 위한 실태조사 및 분석용역

○ 계약기간 : 2014. 5. 30 ~ 2014. 10. 29

○ 계약금액 : 금구천팔백만원 (금98,000,000원)

○ 업 체 명 : 한국정책분석평가원

□ 추진경과

○ 연구착수	:	'14. 5. 30
○ 1차 자문회의	:	'14. 6. 3
○ 착수보고	:	'14. 6. 16
○ 2차 자문회의	:	'14. 6. 27
○ 3차 자문회의	:	'14. 7. 28
○ 중간보고(예정)	:	'14. 10. 14

2		계약기간 연장내용

□ 계약기간 연장 요청사유

○ 자문위원회의 의견반영 시간 소요와 설문지 설계 확정 및 현장조사 일정의 지연으로 전체적인 조사연구 일정이 지연됨

○ 이에 따라 연구기간을 2014년 11월 28일까지 약 30일간 연장하여 조사의 실효성을 확보하고 결과분석 및 연구에 대한 완성도를 높이고자 함.

□ 기간연장 내용

○ 계약기간 연장 : 30일

- 당초 : 2014. 5. 30 ~ 2014. 10. 29

- 변경 : 2014. 5. 30 ~ 2014. 11. 28

○ 지체상금 부과 여부 : 부과하지 않음

3		향후일정

❍	계약기간 연장에 따른 재계약(재무과)	: ’14.9월말
❍	연구용역 중간보고회	: ’14.10.14(예정)
❍	연구용역 최종보고회	: ’14.11월말

붙임. 1. 준공기한 연기의뢰서  1부.

2. 합의각서  1부.  끝.