출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	광역도로과장	토목부장
	박상철	최광무	09/24 노우성

	명에 의하여 구리암사대교 연결도로 건설공사의 지장물 이설 회의를 개최하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2014. 9. 24.
보 고 자 : 직 지방시설주사보 성명 : 박상철

보 고 내 용
일 시	2014. 9.23.(화) 15시
건 명	지장물 이설 회의 결과 보고(구리암사대교 연결도로 건설공사)
내용	▢ 장 소 : 현장 상황실 ▢ 참석자 : 별첨 ▢ 안 건 : 정수장사거리~훈련원사거리 지장물 이설 ▢ 회의내용 〇 지장물 현황 및 공사 시행 설명, 업무협조 요청 ※ 2014년 11월 20일 개통을 위한 협조 요청 〇 지장물 이설시기 건 - 한전 : 10월 중(하순) 가능토록 추진중 - 통신관계업체 (C&M, 드림라인, 세종텔레콤) : 가공선로 이설비 납무되어야 설계가능 : 이설비용 주체는 원인자부담 - 통신(C&M) : 지중선로(아남,대우,롯데 아파트) 발생비용 사업시행자(원인자) 부담 〇 맨홀(인상, 인하)정비 공사 건 - 본부 : 맨홀 인상, 인하를 사업시행자 시행시 선 조치 후 비용청구 - 시설물관리자 : 사업시행자가 조치후 비용 청구시 직접 맨홀 인상, 인하 시행 - 강동수도사업소 : 본부에서 선 조치 후 비용 청구

내용	〇 굴착허가 및 복구, 준공 건 - 굴착허가를 일괄로 제출 제안하였으나 GIS 입력 등 관련법에 따라 각 지장물 관리기관별로 허가 추진 - 한전 : ① 굴착허가 협의 중 ② 시설물(한전주) 이설 후 복구는 토목공사 최종 복구시 일괄 복구 요청 - 강동수도사업소 : 굴착허가 완료 □ 조치의견 - 도로복구 : 전폭 정비함으로 표층 및 보도 복구는 우리시에서 시행. - 맨홀정비 : 강동수도사업, 강동소방서 외에는 시설물 관리기관에서 직접 정비함이 타당함.(구청 치수과 맨홀담당이 불참하여 우리시에서 공문으로 통보) - 지중선로 : 지속적인 협의를 통하여 비용 부담없이 한전주와 병행 이설토록 협조를 구하고자 하며, 지중선로 관리기관에서 비용청구시 현재 예산이 미확보되어 있으므로 도급자에게 우선 납부케 하고 추후 설계변경시 반영함이 타당함. 끝.